		2019 회계연도 특수공시 사업목록

연번	사업명	추진부서	담당자	전화번호	비고
1	청소년 수련관 건립 및 운영	여성청소년과	유복실	560-2317
2	동강 녹색모험의 숲 조성	환경과	이정근	560-2330
3	도시재생 뉴딜사업	도시과	김형철	560-2466
4	정선읍 신도로망(아라리교) 구축	건설과	전인수	560-2485
5	정선읍 봉양9리 공영주차장 조성	안전과	김균태	560-2512
6	대한민국 아리랑 축전 및 정선아리랑제 개최	문화관광과	현명희	560-2138
7	북부권 공공임대주택 건립사업	도시과	신상진	560-2472

1. 청소년 수련관 건립 및 운영

	필요성
❍ 청소년 활동・복지・보호・지도 등 다양한 지원을 통해 청소년의 건강한 성장도모

사업개요

위    치 : 정선읍 북실리 764-14

사 업 량 : 신축 2,810.22㎡(지하1층, 지상3층) / 부지 2,644.6㎡

사 업 비 : 9,464백만원(특교 400, 국5,335, 도387, 군 3,342)

주요시설 : 프로그램실(20실), 교육강의실(8실), 식당, 회의실 등

추진현황

공사착공                     : 2018. 05.

공사준공                     : 2019. 11.

민간수탁자 선정 및 협약 체결 : 2019. 11.

비품 및 집기 구입 설치       : 2019. 11.

준 공 식                     : 2019. 12. 11.

향후계획

청소년의 균형있는 성장을 위하여 수련・문화・교류활동에 필요한 문화 공간 확보로 청소년 복지인프라 구축

2. 동강 녹색모험의 숲 조성

	필요성
❍ 우수한 자연자원을 활용한 종합녹색 휴양레포츠단지 조성 ❍ 관광트렌드 변화에 대응하는 차별화된 시설을 조성

사업개요

위    치 : 병방산 군립공원 및 동강생태체험학습장 일원

사 업 량 : 24,000㎡

사업내용 : 야영장 조성, 트래킹코스 조성, 그린어드벤처 조성, 솔치유공간 조성, 주차장, 짚코스터, 짚라인 조성, 안내체계개선, 동강문화센터 조성 등

사 업 비 : 9,740백만원(국비 4,870, 도비 1,461, 군비 3,409)

사업기간 : 2014년 ~ 2019년(6년간)

추진실적

야영장 개장 및 관리이관(시설관리공단)       : 2017. 6월

솔치유공간(탐방로 및 쉼터) 조성 완료        : 2018. 7월

숲속야영장 및 어드벤처(체험 3개코스) 조성   : 2018.12월

짚라인 조성공사 실시설계 및 계약심사       : 2019. 6월

주차장(26대, 873㎡) 조성 완료                : 2019. 7월

짚코스터(어드벤처 모험숲 2차, 310m) 조성 완료  : 2019. 8월

짚라인(어드벤처 3차, 186m) 조성 착수 추진   : 2019.10월~

- 짚라인 조성 준공예정 : 2020.02.10.

글램핑장, 안내체계시스템 구축 실시설계 완료 : 2019.10월

글램핑장(텐트 13동) 및 안내체계구축 조성 추진 : 2019.11월~

시설사용료 및 위탁료 산정 용역 추진         : 2019.12월~

향후 계획

관광객 유입 증대 및 지역경기 활성화

3. 도시재생 뉴딜사업

	필요성
❍ 공동이용시설과 생활편의시설 공급 등 생활 밀착형 주거환경 개선을 통한 도심 활성화 및 주민공동체 회복 도모

사업개요

사업위치 : 사북읍 사북 7리/10리

사업기간 : 2019년 ~ 2021년 (3년간)

사 업 비 : 9,430백만원 (국 4,500 도 900 군 4,030) *자부담 별도 155

※ 2020년 사업비 : 3,494백만원 (국 1,550 도 310 군 1,634)

사업내용 : 3개 분야 9개 단위사업

- 사랑채 1호점 및 해봄커뮤니티센터 신축, 사랑채(집수리) 정비사업,

칸델라 불빛거리 조성, 마을길 환경정비, 사북장독대 조성 등

추진실적

사북 해봄마을 도시재생 뉴딜사업 추진

- 공기관 대행사업 협약 체결            : 2019.6.21. / 강원도개발공사

- 실행계획 승인(국토부)                 : 2019.9.24.

- 실시설계용역 착수                    : 2019.11.12. ~ 2020.9.11.

- 건물 신축공사 실시설계 완료 및 우선 착공 : 2020. 5월

‣ 사랑채 1호점 / 해봄커뮤니티센터 신축공사

- 실시설계 완료 및 기타 편의시설사업 착공  : 2020. 9월

- 사업 완료 : 2021. 12월

소규모재생사업 추진

- 고한 18번가 마을호텔 1호점 조성사업 완료 : 2019. 12월

* 시범운영 : 2020. 2월 /  개장 : 2020. 3월

향후계획

공동이용시설과 생활편의시설 공급 등 생활 밀착형 주거환경 개선

4. 정선읍 신도로망(아라리교) 구축

	필요성
❍ 제2교 노후화 대비 우회도로 구축으로 내구연한 증가 및 교통량 분산 ❍ 종합운동장 일원의 균형발전 및 외연확대로 거점도시 육성

사업개요

위    치 : 제방도로(조양연립 뒤)∼팔각정∼종합운동장 입구

사 업 량 : 교량 L=460m, B=15m, 접속도로 L=215m

총사업비 : 45,000백만원 (2020년 4,000백만원)

사업기간 : 2019 ∼ 2023 (5년)

추진실적

『신도로망 (아라리교) 구축계획』수립             : '18. 08. 08.

군계획시설(도로) 결정 용역 착수                 : '18. 10월

아라리교 건설(실행) 계획 확정                    : '19.  2월

디자인 및 타당성 용역 착수                     : '19.  6월

대형공사 입찰방법 확정(강원도) ⇨ 기본 및 실시설계 : '19. 12월

향후계획

제2교 노후화 대비 우회도로 구축으로 내구연한 증가 및 교통량 분산

종합운동장 일원의 균형발전 및 외연확대로 거점도시 육성

5. 정선읍 봉양9리 공영주차장 조성

	필요성
❍ 상권 르네상스 공모사업 확정으로 기존 건물을 개축하여 지역 상권 발전에 기여

사업개요

사 업 명: 정선읍 봉양9리 공영주차장 조성사업

위    치: 정선군 정선읍 봉양리 46-27

소 재 지	지 목	토지면적	건축면적	비 고
정선읍 봉양리 46-27	대지	1,086㎡	433.58㎡

주 차 면: 30면

사 업 비: 1,300백만원

추진실적

편입 지장물·토지 현황측량 완료: 2019. 6월

편입 지장물·토지 보상금 지급 및 등기완료: 2019. 7월

향후계획

잔여부지 주차장 조성으로 주차공간 제공.

6. 정선읍 소재지 종합정비 사업

	필요성
❍ 정선 대표 축제인 정선 아리랑제 육성을 통한 관광 활성화 및 문화 콘텐츠 성장 기반 마련

사업개요

축 제 명 : 2019 대한민국 아리랑 대축제, 제44회 정선아리랑제

& 제7회 세계 대한민국 아리랑 축전

기  간 : 2019. 10. 4.(금) ~ 10. 7.(월)

장  소 : 정선읍 아라리공원, 아라리촌, 녹송공원 일원

사업비 : 1,479백만원 (국비 100, 도비 95, 군비 1,284)

추진실적

프로그램 운영 : 12개 부문 / 53개 행사 / 68개 종목

추진결과

- 방 문 객 : 86,476명〔내지인 41,508(48%), 외지인 44,968(52%)〕

-  경제유발효과 : 6,745백만원

주요성과

- 2020 ~ 2021년 정부지정 문화체육축제 선정 : 2019. 12. 27

- 축제공간 개선

‧ 정선 옛마을 조성(정선 옛 주거형태 등) 및 전통식 부스 제작

‧ 아라리 밤마실(정선 야간 관광 축제) 병행 추진

‧ 관광객 편의 휴게시설(카페테리아) 설치

- 군민 참여 : 평화기원 읍면 길놀이, 군민 민속놀이 한마당 등

- 자원 활용 : 아리랑센터, 박물관, 아라리촌, 아리샘터 활용 축제 확대

향후계획

관광 활성화 및 문화 콘텐츠 성장을 위한 추진

7. 북부권 공공임대주택 건립사업

	필요성
❍ 서민 공공임대주택 공급을 추진하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여 ❍ 지역 내 주거난 해소를 통한 지역주민의 정주여건 향상에 기여

사업개요

위    치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원(A=6,517㎡)

사 업 량 : 공공임대주택 80호(국민 50호, 행복 30호)

사 업 비 : 15,100백만원

추진실적

북부권 공공임대주택 건립 대상지 결정(북평면)   : 2019. 3. 27.

마을정비형 공공임대주택사업 공모신청(국토부)   : 2019. 8. 29.

국토부 평가위원회 현지실사                    : 2019. 10. 24.

대상지 확정(국토부)                            : 2019. 12월

시행협약체결(정선군⇔LH)                       : 2020. 4월

향후계획

정선 북부권(북평면)지역의 공공임대아파트 공급을 통해 정주여건을

개선하고 2018년 평창동계올림픽 유치지역 지속성장 도모