109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 정선군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
국가생태문화 탐방로 조성사업 (동강따라 천리길)	6,000	656	956	488	3,900	2021	2016	40
동강녹색모험의 숲 조성	9,740	7,556	652	1,532	-	2020	2015	90
용탄천생태하천복원사업	19,000	6,500	2,000	6,450	4,050	2021	2016	10
여량면 천년의숲 조성사업	1,500	200	300	300	700	2022년	2019	30
목재문화체험장 조성사업	5,440	240	-	5,200	-	2021	2017	20
야생화단지 쿠키체험관조성	2,730	1,308	126	1,296		2020	2015	52
정선화암동굴 개선사업	3,900	200	1,800	1,900		2020	2016	51
화암(그림바위권역)창조적마을 만들기 사업	3,380	1,921	429	1,030		2020	2016	69
정선아리랑제 행사	829	3,835	768	669	669	계속	2018	완료
세계 대한민국 아리랑축전	250	1,500	234	250	250	계속	2019	완료
야생화마을 골목길 정원박람회	980	0	280	200	500	연례 반복	2019	25
군도4호(선평~가수) 도로개설	9,800	7,700	1,500	600	-	2020	2017	84.5
군도7호(사북~직전) 도로개설	18,000	3,600	4,172	4,369	5,859	2022	2017	42.5
행복주택건립사업	20,500	14,505	5,995	-	-	2019	2016	100
사북 도시재생 뉴딜사업	9,585		4,300	3,649	1,636	2021	2018	30
치매‧정신건강통합센터 신축	5,000	3,900	520	-	580	2020	2017	90
지장천 하수처리시설 증설사업	16,775	15,524	1,251	-	-	2019	2014	100
주례마을 어울연못 조성	4,000	49	4	2,947	1,000	2022	2017	30
원빈 소풍 가던길 조성	1,800	193	606	710	91	2021	2017	60

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘19년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국가생태문화탐방로 조성사업

담당자

환경과 이정근(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강유역 생태·경관보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태       문화탐방로 조성으로 상생발전 도모 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년(6년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 광하리 ~ 신동읍 덕천리

○ 규 모 : 탐방로 조성 전체 34km(정선군 25km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	656	956	488	3,900
국 비	3,000	328	478	244	1,950
시 도 비	600	66	96	48	390
시군구비	2,400	262	382	196	1,560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 타당성 검토 및 실시설계 추진                   : ‘16. 11월

○ 생태경관보전지역 내 행위허가 완료              : ‘17. 12월

○ 귤암쉼터 조성사업 준공                         : ‘18. 6월

○ 탐방로(나리소), 탐방센터(연포분교) 조성사업 준공 : ‘19. 12월

○ 탐방로(가수리, 고성리) 실시설계 추진            : ’20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 탐방로(가수리, 고성리) 실시설계 완료 : ’20. 10월

○ 각종 인허가 추진                    : ’20. 9월 ~ 12월

○ 탐방로(가수리, 고성리) 공사추진      : ’21. 3월 ~ ’21. 10월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

동강녹색 모험의 숲 조성

담당자

환경과 이정근(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병방산 군립공원 일원의 수려한 산림자원과 동강 주변의 우수한 수변자원을

활용하여 관광트렌드 변화에 대응하는 녹색 휴양 레포츠단지 조성으로 지역       경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년(8년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 병방산 군립공원 및 모평문화공원 일원

○ 규 모 : 친수공간 및 야영장 조성, 솔치유공간, 어드벤처 코스 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,740	7,556	652	1,532	-
국 비	4,870	3,778	326	766	-
시 도 비	1,461	1,133	98	230	-
시군구비	3,409	2,645	228	536	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 지방재정 투자심사(조건부)            : 2013. 11월

○ 트래킹코스 정비사업 완료            : 2014. 12월

○ 지방재정 투자심사(적정)              : 2015. 10월

○ 친수공간 및 야영장 조성 완료        : 2016. 12월

○ 군립공원 공원계획 변경              : 2017. 6월

○ 솔치유공간, 에코어드벤쳐 조성 완료  : 2019. 6월

○ 숲속야영장(글램핑), 짚라인 조성 완료 : 2020. 3월

□ 향후계획

○ 시설보강공사 추진 : 2020. 8월 ~ 10월

○ 사업완료 및 정산  : 2020. 10월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

용탄천 생태하천복원사업

담당자

환경과 전찬영(☎560-2332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용탄천 물길 및 생태복원으로 하천 자생력, 생태적 기능, 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년(4년)

○ 위 치 : 정선군 회동리(회동3교)~ 용탄리(행마교)

○ 규 모 : 5.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,000	6,500	2,000	6,450	4,050
국 비	4,000	3,000	1,000	0	0
시 도 비	5,500	0	0	2,000	3,500
시군구비	2,850	1,400	300	600	550
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	6,650	2,100	700	3,850	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수            : 2017. 5월

○ 용탄천 하천기본계획 변경 고시         : 2019. 8월

○ 토질조사 및 실시설계 진행(공정률 80%) : 2019. 11월~

□ 향후계획

○ 원주환경청 설계 기술검토 및 강원도 생태하천 심의 : 2020. 10월

○ 편입토지 보상협의                                : 2020. 12월

○ 시설공사 착공                                    : 2020. 11월

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2017년 ~ 2019년, 변경 : 2017년 ~ 2020년

사업명

여량면 천년의숲 조성사업

담당자

산림과 이유경(☎560-2445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방치된 유휴지, 관광지 일원을 활용한 특색있는 경관숲 조성사업으로서 가로수로 식재되었다가 폐기될 위기의 은행나무를 활용하여 지역관광자원과 연계할 수 있는 산림경관 자원의 개발 및 휴양공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 여량면 유천리 863번지 외1필지

○ 규 모 : 3.96ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,500	200	300	300	700
국 비
시 도 비	650			195	455
시군구비	850	200	300	105	245
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 천년의숲 조성사업 기본계획 수립 : 2018. 7. ~ 2018. 11.

○ 은행나무 식재 및 부지정비 : 2018. 4. ~ 2019. 7.

○ 천년의숲 조성사업 실시설계용역 : 2019. 9. ~ 2019. 12.

○ 2020년 산림조경숲(균특) 예산 확보 : 3년간 1,000백만원

○ 천년의숲 조성사업 전체분 및 1차분 사업 추진 : 2020.6.5. ~ 2020.12.1.

□ 향후계획

○ 천년의숲 조성사업 2차분, 3차분 사업 추진 : 2021.3. ~ 2022.12.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경 후	증 감	비 고
사업규모	41,772㎡	39,683㎡	△2,089㎡	국도비예산 확보(10억)
총사업비	2,500백만원	1,500백만원	△1,000백만원

사업명

목재문화체험장 조성사업

담당자

산림과 이유경(☎560-2445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목재 및 목재제품에 대한 종합적인 지식과 정보를 제공하고 직접 만들어

볼 수 있는 교육·체험공간으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

○ 위 치 : 정선읍 광하리 16번지 일원(모평문화공원)

○ 규 모 : 부지면적 25,025㎡, 연면적 1,410㎡

- 목재문화체험장 1동(지하1층, 지상2층), 목재체험실 1동(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,440		240	2,250	2,950
국 비	1,800			1,800
시 도 비	2,672			135	2,537
시군구비	968		240	315	413

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계용역 : 2018.12.13. ~ 2019. 7.30.

○ 경영수지분석, 운영프로그램개발, 각종 인증용역 : 2020. 1. ~ 2020. 10.

○ 생태경관보전지역 행위허가, 건축허가, 실시계획인가 : 2020. 7.

○ 감리용역(건축, 전기, 소방) 사업추진 : 2020 .7. ~ 2021. 8.

○ 건축, 전기, 소방, 통신, 폐기물 사업 추진 : 2020. 8. ~ 2021. 8.

□ 향후계획

○ 전시부분 사업추진 : 2020. 9. ~ 2021. 8.

○ 운영을 위한 조례 제정 및 개정 : 2021. 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 목재문화체험장 조성 및 운영 지침 일부 개정(2019.1.4.)에 따라 일부사업 변경

- 당초 숲속의 집(숙박시설) 및 산림욕장은 사업계획에서 제외하고,

- 당초 목재문화체험시설 및 목재놀이터 등 체험공간 확충으로 변경 추진

사업명

야생화단지 쿠키체험관 조성

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의료관광과 함께 고부가가치 융‧복합산업으로 발전하고 있는 웰니스‧테       라피‧힐링투어를 중심으로 선도적인 관광상품개발

○ 주변관광지와 연계한 야생화 테마 체험프로그램 운영으로 관광객 유입을       통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 5-26번지 일원

○ 규 모 : 쿠키체험장 조성A=264.33㎡ (1층 221.50㎡, 2층 42.83㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,730백만원(국비 1,365, 도비 409, 군비 956)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,730	1,308	126	1,296
국 비	1,365	654	63	648
시 도 비	409	196	19	194
시군구비	956	458	44	454
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

○ 지방재정 투자심사 완료 : 2015. 1.

○ 예비타당성 조사완료 : 2016. 6. 13.

○ 실시설계용역 완료 : 2019. 12.

○ 계약심의 완료 : 2020. 7.

□ 향후계획

○ 야생화쿠키체험장 준공 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 없음

사업명

정선 화암동굴 개선사업

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암동굴내 노후 시설물 개선을 통한 쾌적하고 안전한 관람환경을 구축,       첨단 전시기법을 활용한 새로운 전시물을 설치하여

○ 관광객 요구에 능동적 대처로 관광객 유입 증대 등 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 정선군 화암면 화암리(화암동굴) 541번지 일원

○ 규 모 : 화암동굴 재 정비(전시물 교체 및 추가) L=1.8km, A=2,800㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원(국비 1,950, 도비 585, 군비 1,365)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,900	200	1,800	1,900
국 비	1,950	100	900	950
시 도 비	585	30	270	285
시군구비	1,365	70	630	665
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

○ 지방재정 투자심사 완료 : 2016. 3. 4.

○ 예비타당성 조사완료 : 2016. 6. 13.

○ 실시설계용역 완료 : 2018. 12. 3.

○ 계약심의 완료 : 2019. 8. 13.

□ 향후계획

○ 사업완료 : 2020. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경사항 없음

사업명

화암(그림바위권역) 창조적마을만들기 사업

담당자

문화관광과 신석하(☎560-2362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암면 화암리 지역공동체 활성화를 통한 지속 가능한 정주여건 조성

○ 문화관광 자원개발로 지역주민 삶의 질 향상]

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 강원도 정선군 화암면 화암1리, 2리 일원

○ 규 모 : 기초생활기반확충사업(3개), 지역경관개선사업(4개),

지역역량강화사업(4개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,380	1,921	429	1,030
국 비	2,366	1,345	300	721
시 도 비
시군구비	1,014	576	129	309
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  69%)

○ 설계 완료 및 시행계획 승인 : 2019. 5. 16.

○ 건축공사착공 : 2019. 6. 12.

○ 지역역량강화사업 진행중 : 2017 ~ 2020

□ 향후계획

○ 총 공사 준공 : 2020. 12.

사업명

정선아리랑제 행사

담당자

문화관광과 현명희(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유네스코 인류무형문화유산, 강원도 무형문화재 제1호인 정선아리랑의         역사와 문화를 이해하고 보존과 계승발전의 중추적 역할

○ 모든 아리랑과 민요의 시원으로 평가받는 정선아리랑의 의미를 되돌아       보고 축제를 통한 정선아리랑의 보급에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 4. ~ 10. 7. (4일간)

○ 위 치 : 정선읍 아라리공원 일원

○ 규 모 : 12개 부문 53개 세부행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 767백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,260	3,835	767	829	829
국 비
시 도 비	370	225	45	50	50
시군구비	5,890	3,610	722	779	779
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 12개 부문 53개 행사, 68개 종목의 프로그램 구성

○ 결산보고서 및 정산 완료

□ 향후계획

○ 코로나19로 제46회 정선아리랑제 홍보 및 프로그램 개발

○ 2021년 제46회 아리랑제 프로그램별 추진상황 최종 점검

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제7회 세계 대한민국 아리랑 축전

담당자

문화관광과 현명희

(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유네스코 인류무형문화유산이며 국가중요무형문화재 제129호인 강원도       무형문화재 제1호 정선아리랑을 원형 보존 및 창조적 계승

○ ‘세계 대한민국 아리랑 축전’ 개최를 통하여 국내.외 관광객이 자유롭게

유입할 수 있는 관광자원으로 활용하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. 4. ~ 10. 7. (4일간)

○ 위 치 : 정선읍 아라리공원 일원

○ 규 모 : 유네스코 인류무형문화유산 교류공연 및 다수프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 234백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,984	1,250	234	250	250
국 비	794	500	94	100	100
시 도 비	357	225	42	45	45
시군구비	833	525	98	105	105
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 12개 부문 53개 행사, 68개 종목의 프로그램 구성

○ 결산보고서 및 정산 완료

□ 향후계획

○ 코로나19로 제8회 세계 대한민국 아리랑 축전 개최 준비

○ 2021년 아리랑축전 프로그램별 추진상황 최종 점검

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

야생화마을 골목길 정원박람회

담당자

경제과 최연규(☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 축제인『함백산 야생화 축제』와 연계하여 고한의 문화자원을 적극적으로 발굴·활용하고 문화콘텐츠 산업 분야의 새로운 분야를 개척하여,

○ 고한 야생화 축제의 전국축제 도약과 방문객의 도심지 유입을 통한 지역소득 창출 및 주민 자립기반 조성

□ 사업개요

○ 행사기간 : 2019년 7월 28일 ~ 8월 11일 (15일간)

○ 추진기간 : 2019년 5월 1일 ~ 7월 28일 (3개월)

○ 참여마을 : 고한읍 5개 마을 (19리, 10리, 18리, 17리, 12리)

○ 규    모 : 고한 10 ~ 17리 골목길 정원박람회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	980	280	200	250	250
국 비
시 도 비	686	196	140	175	175
시군구비	294	84	60	75	75
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 주민추진단 구성 및 발대식 : 2017. 11월

○ 고한17리 신촌골목 경관개선 디자인 용역 : 2017. 9월 ~ 11월

○ 고한읍 야생화마을 디자인 기본용역 추진(강원도) : 2017. 12월

○ 고한18리 마을 만들기 추진위원회 구성 운영 : 2018. 02월

○ 고한17리 경관개선 사업 실행주체 구축 : 2018. 03월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

군도4호(선평～가수) 도로개설공사

담당자

건설과 전인수(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로망 확충으로 농촌지역 교통원활 및 주민 숙원사업 해결

○ 집중호우 시 교통두절 및 고립지역 해소로 주민 생활불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 남면 광덕리 ~ 정선읍 가수리

○ 규 모 : 도로개설 L= 1,438m(교량 2개소 L=238m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800	7,700	1,500	600	-
국 비
시 도 비
시군구비	9,800	7,700	1,500	600	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84.5%)

○ 실시설계 추진                      : ‘17.  5월

○ 정선군 기술자문위원회 심의          : ‘17.  7월

○ 전체분 및 1차분 착공               : ‘17. 11월

○ 2차분 착공                         : ‘18.  5월

○ 1차분 준공                         : ‘19.  5월

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공                   : ‘20.  9월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군도7호(사북~직전) 도로개설공사

담당자

건설과 전인수(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지형적 여건에 따른 구조불량 구간을 개선하여 각종 안전사고 예방

○ 사북시가지와 직전의 접근성 개선에 따른 정주여건 개선으로 군민의 삶의       질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022

○ 위 치 : 사북읍 사북리 348번지 ~ 직전리 521-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L= 1.73km(터널 L=299m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000	3,600	4,172	4,369	5,859
국 비
시 도 비
시군구비	18,000	3,600	4,172	4,369	5,859
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42.5%)

○ 기본 및 실시설계 추진                : ‘17.  5월 ~ ’18. 7월

○ 강원도 건설기술심의위원회            : ‘18. 12월

○ 도로구역 결정 및 지형도면 고시       : ‘19.  2월

○ 착    공                             : ‘19.  5월

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공                     : ‘22.  5월

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	용역비	토목공사	전기공사	부대경비	보상비	비 고
당 초	16,000	2,000	12,900	-	100	1,000
변 경	18,000	2,000	13,230	670	100	2,000
증,감(△)	2,000	-	330	670	-	1,000

사업명

행복주택 건립사업

담당자

도시과 신상진(☎560-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐광지역 내 신혼부부, 청년 및 사회취약계층의 주거안정에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 04~ 2019. 08

○ 위 치 : 고한읍 고한리 63-40번지 일원

○ 규 모 : 행복주택 150세대 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,500	14,505	5,995
국 비	4,469	3,128	1,341
시 도 비	3,277	2,294	983
시군구비	12,754	9,083	3,671
지 방 채			-
민간자본			-
기 타			-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 주택건설사업계획승인(강원도) : 2016. 12. 16.

○ 공사착공                    : 2017. 5. 31.

○ 공사준공 및 입주            : 2019. 8. 9

□ 향후계획

○ 행복주택 운영 관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

사북 도시재생 뉴딜사업

담당자

도시과 김형철(☎560-2466)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소규모 주민생활 밀착형 공공시설 공급과 자발적 주거환경 개선 유도를 통해 쇠퇴한 폐광지역의 주거복지 실현 및 공동체 활성화, 지역경쟁력 회복 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2021년

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 313-7 일원

○ 규 모 : 3개 분야 9개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,585백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,585		4,300	3,649	1,636
국 비	4,500		2,100	1,550	850
시 도 비	900		420	310	170
시군구비	4,030		1,780	1,634	616
지 방 채
민간자본	155			155
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 도시재생 뉴딜 공모사업 최종 선정   : 18. 8월

○ 실행계획 승인(국토교통부)           : 19. 9월

○ 실시설계용역 완료                  : 20. 6월

○ 강원도 계약심사 의뢰               : 20. 7월

□ 향후계획

○ 시설공사 계약 및 발주 : 20. 8월

○ 시설공사 착공         : 20. 9월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

정선군 치매정신건강 통합센터 신축

담당자

보건소 신경환(☎560-2726)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매환자의 지속적인 치료관리로 치매의 진행을 완화시키고 증상을 호전시켜 주변 가족의 부담경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 녹송로 33

○ 규 모 : 연면적 A=1,284㎡, 지하1층/지상1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2019년	2020년 이후
계	5,000	3,900	520		580
국 비	494	494
시 도 비	25	25
시군구비	99	99
지 방 채
민간자본
기 타	4,382	3,282	520		580

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 90%)

○ 치매‧정신건강통합센터 신축공사 : ‘18. 10. 15. ~ ‘20. 1. 31.(준공예정)

□ 향후계획

○ 치매‧정신건강통합센터 준공 : ‘20. 1. 31.

○ 치매‧정신건강통합센터 운영 : 2020년 ~

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비		비 고
	당 초	변 경
치매‧정신건강통합센터 신축	3,900	5,000	설계변경으로 인한 사업비 변경

사업명

지장천 하수처리시설 증설사업

담당자

상하수도사업소

조윤희(☎560-2524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리구역 내 개발여건의 변경 및 유동인구 증가에 따른 생활하수 발생량 급증으로 기존 하수처리장 시설용량 부족

○ 처리용량 증설을 통한 발생 하수의 전량차집 및 적정한 하수처리로 지장천 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014~2019

○ 위 치 : 정선군 남면 무릉리425번지 지장천하수처리시설내

○ 규 모 : 증설 Q=3,500톤/일(기존용량 Q=6,000톤/일),관로2.06㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  16,775백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,775	15,524	1,251	0	0
국 비	11,628	11,481	147	0	0
시 도 비
시군구비	2,157	1,601	556	0	0
지 방 채				0	0
민간자본
기타(기금)	2,990	2,442	548	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업준공 : 2019. 3. 29.

○ 정산보고 : 2019. 10. 24.

□ 향후계획

○ 시설운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

주례마을 어울연못 조성사업

담당자

여량면 김동건(☎560-2666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레일바이크 종착역인 아우라지역 앞 주례마을과 여량면 시가지를 연계한       관관공간 조성을 통한 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022 (5개년)

○ 위 치 : 여량면 여량리 262-3번지 외 13필지

○ 규 모 : 어울연못 조성 4,764㎡, 주례마을~시가지 연계 경관 조성 L=200

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :        백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	49	4	2,947	1,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	49	4	2,947	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 주례마을 어울연못 조성사업 투자심사               : 2017. 11. 20.

○ 실시설계 용역 완료                                : 2018. 12. 10.

○ 정선군 공유재산심의회 변경 심의(제2019-35호)       : 2019.  7.  9.

○ 공기관(농어촌공사 ) 일괄 위탁 협약 체결            : 2019. 11. 26.

○ 주례마을 어울연못 조성사업 감정평가               : 2019. 12. 06.

□ 향후계획

○ 손실보상 협의 추진                                : 2020.2월~ 8월

○ 주례마을 어울연못 조성사업 공사 착공              : 2020. 9월(예정)

○ 주례마을 입구(주례쉼터) 공사 착공                 : 2021. 3월(예정)

□ 사업변경 내역                                          (단위 : 백만원)

당 초 (심사일기준 )	변 경	증 감	변 경 사 유
6,000	4,000	▽2,000	버스정류장 이전 및 쉼터조성 1식 ( 안전과 추진 )

사업명

원빈 소풍가던길 조성사업

담당자

여량면 김동건(☎560-2666)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레일바이크, 주례마을, 어울연못 등 면중심지 관광시설과 연계한 즐길거리       제공을 통한 체류시간 증가시킴으로써 지역 상권화 활성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년(4개년)

○ 위 치 : 여량면 여량리 690-4 외 4필지

○ 규 모 : 공동묘지 이설 및 공원조성(17,200㎡), 인도교 설치 L=370m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	1,800	193	606	630	371
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 원빈 소풍가던길 조성사업 투자심사                 : 2017. 11. 20.

○ 실시설계 용역 완료                                : 2018. 12. 10.

○ 아우라지 일원 소공원, 돌탑, 정자 조성(각1개소)      : 2019.  5. 13.

○ 인도교(데크로드 1차분) 공사 준공 [L=260m]         : 2019.  8. 17.

□ 향후계획

○ 무연분묘 개장 및 이설                              : 2020. 3월 ~ 6월

○ 인도교(데크로드 2차분) 공사 착공[L=109m]           : 2020. 7월 ~ 9월

○ 빈의 언덕 조성사업 착공                            : 2020. 9월

○ 원빈 소풍가던길 소공원 조성사업 착공               : 2020. 10월

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

당 초 (심사일 기준 )	변 경	증 감	변 경 사 유
2.400	1.800	▽600	출렁다리 및 청보리밭 조성 사업 중지