2		2020회계연도 특수공시 사업목록

연번	사업명	추진부서	담당자	전화번호	비고
1	고한복합문화센터건립(생활SOC복합화사업)	여성청소년과	장은영	560-2943
2	공립 치매전담형 노인요양시설 건립	복지과	이명아	560-2975
3	남면 칠현사 이전 건립	문화관광과	김주희	560-2564
4	임계·북평 생활문화센터 조성	문화관광과	윤수정	560-2363
5	군도7호(사북~직전) 도로개설	건설과	전인수	560-2485
6	봉양2 급경사지 붕괴위험지역 정비	건설과	서건식	560-2496
7	공공건축물 그린 리모델링 지원사업	도시과	정예슬	560-2490

1		고한복합문화센터 건립(생활SOC복합화 사업)

□ 고한읍 주택 밀집 지역의 주차난 해소와 시가지 접근성 향상을 위한 주거단지 보행네트워크 구축 및 지역 아동·청소년과 주민이 함께 소통할 수 있는 지역 커뮤니티 공간 조성

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 정선군 고한읍 고한리 274-13

❍ 사 업 량 : 부지 1,365㎡ / 건축 연면적 5,135㎡ / 지상 7층 규모

❍ 사 업 비 : 9,000백만원(국2,323, 도284.4, 군6,392.6)

❍ 주요시설 : 주차타워(1~4층), 생활문화센터(5~7층), 보행교

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

❏ 추진실적

❍ 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 07.

❍ 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 10.

❍ 생활SOC 복합화 사업 선정 : 2019. 10.

❍ 고한 복합문화센터 설계용역 시행계획 수립 : 2020. 02. 07.(금)

❍ 설계공모 입찰공고 : 2020. 02. 27.(목)

❍ 제안서 접수 및 심사 : 2020. 04. 17.(금) ~ 04. 29.(수)

❍ 설계용역 업체 선정 : 2020. 04. 29.(수)

❏ 향후 추진계획

❍ 공사 착공 및 준공 : 2021. 03월 ~ 2022. 08월

❍ 센터 개관 : 2022. 10월 중

2		공립 치매전담형 노인요양시설 건립

□ 급속한 고령화로 인한 치매 인구 증가에 따른 시설 확충 필요

□ 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 정선읍 신월리 896-3외 4필지(4,814㎡, 군유지)

❍ 사 업 량 : 건물 연면적 1,345㎡, 정원 57명 규모

❍ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘22년

❍ 사 업 비 : 5,290,000천원(국2,422,000, 도605,000, 폐광기금2,263,000)

* ‘20년 사업비 : 2,246,000천원

❏ 추진실적

❍ 공공건축 사업계획 사전검토      : ‘20.5월

❍ 정선군 공공건축심의위원회 심의  : ‘20.6월

❍ 기본 및 실시설계용역 제안공모   : ‘20.9월

❍ 기본 및 실시설계용역 착수       : ‘20.9월

❏ 향후 추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 준공       : ‘21.5월

❍ 설계심사 및 공사 입찰           : ‘21.6월

❍ 공사착공                        : ‘21.7월

❍ 민간위탁 사업자 선정            : ‘22.10월

❍ 시설개원                        : ‘23.1월

3		남면 칠현사 이전 건립

□ 정선아리랑의 근원설화에 등장하는 칠현의 애국충절을 기리기 위해 ‘98년에     조성된 칠현사가 국도 59호선 확장에 따라 공원 이전 사업 추진

❏ 사업개요

❍ 대 상 지 : 남면 낙동리 103번지 일원(7,820㎡)

❍ 사 업 량 : 유적공원 조성 1식(칠현사, 칠현비, 고직사, 공원, 주차장)

❍ 사업기간 : ‘19년 ~ ‘22년(4년)

❍ 사 업 비 : 5,100백만원(군비)

❏ 추진실적

❍ 칠현사 이전건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 완료 : ‘18. 3월

❍ 지방도 59호선 확포장 구간 편입에 따른 지역주민 의견 수렴

‣ 남면 낙동리 103번지 일원으로 이전건립 결정(남면)

❍ 거칠현 유적공원 이전건립사업 계획 수립 : ‘18. 9월

❍ 정선군 공유재산 심의 완료 : ‘18. 11월

❍ 거칠현 유적공원 사업계획 변경 방침결정(부지축소) : ‘19. 3월

❍ 토지·지장물 감정평가 및 토지매입 완료(1차) : ‘19. 3월

❍ 정선군 중기지방재정 반영 : ‘19. 10월

❍ 토지·지장물 매입 완료(2차) : ‘20. 2월

❍ 거칠현 유적공원 이전건립 실시설계 용역 착수 : ‘20. 4월

❏ 향후 추진계획

❍ 거칠현 유적공원 이전건립 실시설계 용역 완료 : ‘21. 3월

❍ 사업 착수 및 완료 : ‘21. 4월 ~ ‘22. 6월

4		임계·북평 생활문화센터 조성

□ 지역주민 누구나 일상에서 문화를 쉽게 접하고 즐길 수 있는 주민들의      문화공간 확충을 위한 생활문화센터 활성화 사업

❏ 사업개요

❍ 임계 생활문화센터 조성

‣ 위    치 : 임계면 서동로 4575(임계주민자치센터)

‣ 사 업 량 : 생활문화센터 조성 A=528㎡(지상2층)

‣ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 400, 군비 600)

❍ 북평 생활문화센터 조성

‣ 위    치 : 북평면 북평3길 73(구 북평면 보건지소)

‣ 사 업 량 : 생활문화센터 조성 A=200㎡(지상1층)

‣ 사 업 비 : 600백만원(국비 240, 군비 360)

❏ 추진실적

❍ 임계 생활문화센터 조성

‣ 생활문화센터 조성 실시설계용역               : ‘19년 10월 ~ 12월

‣ 생활문화센터 조성 이전 사무실 환경개선 공사  : ‘20년 4월

‣ 생활문화센터 조성 도 계약심사 완료           : ‘20년 6월

‣ 생활문화센터 조성 리모델링 공사 착공         : ‘20년 7월

❍ 북평 생활문화센터 조성

‣ 생활문화센터 조성 실시설계용역                : ‘19년 12월 ~ ‘20년 2월

‣ 생활문화센터 조성 계약심사 완료              : ‘20년 5월

‣ 생활문화센터 조성 리모델링 공사 착공         : ‘20년 6월

❏ 향후 추진계획

❍ 임계·북평 생활문화센터 조성 공사 준공         : ‘20년 12월

❍ 정선군 생활문화센터 운영 조례 정비           : ‘20년 12월

❍ 임계·생활문화센터 운영 및 개관                : ‘21년  3월

5		군도7호(사북~직전) 도로개설

□ 접근도로 개선으로 지역발전 및 경기 활성화 견인

□“주거형 지구단위계획구역”개발촉진으로 균형발전 기여

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 사북읍 사북리 348번지 ~ 직전리 521-1번지 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=1.73km(터널 L=314m), B=8.5m

❍ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	기투자	2020년	이후 투자계획			비 고
					2021년	2022년	2023년
재 원 별	계	18,000	7,772	5,009	5,219	-	-
	군 비	300	300	-	-	-	-
	폐광기금	17,700	7,472	5,009	5,219	-	-

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(계속비)

❍ 시 공 사 : ㈜두성종합건설 외 1개사

❍ 건설사업관리 : ㈜용마엔지니어링 외 4개사

❏ 추진실적 (공정률 54%)

❍ 기본 및 실시설계 추진                   : '17.  5월 ~ '18. 7월

❍ 문화재지표조사, 교통시설안전진단 추진    : '18.  6월

❍ 설계 경제성 및 안전성 검토용역 추진     : '18.  9월

❍ 강원도 건설기술심의위원회 심의          : '18. 11월

❍ 발주 및 계약(조달청 의뢰)               : '19.  2월

❍ 사업 착공                               : '19.  5월

❍ 종점부(직전) 회전교차로 설치 설계 추진  : '20. 10월

❍ 터널굴착 완료                           : '20. 11월

❏ 향후 추진계획

❍ 사업 준공                               : '22.  5월

6		봉양2 급경사지 붕괴위험지역 정비

□ 급경사지 사면의 토사유출 및 산사태 발생으로 하부도로 차량주행시 낙석에 따른

인명 및 재산 피해 위험 상존

□ 사면보강을 통한 낙석예방으로 군도3호선의 안전한 주행여건 마련

▸주민수혜도 : 530세대 1,000명, 일차량 평균 통과대수 500여대 / 농경지 10ha

❏ 사업개요

❍ 위    치 : 정선읍 봉양리 산10번지 일원(군도3호 정선병원 밑)

❍ 지정현황 : 붕괴위험 “D”등급 / 면적 A=25,092㎡

❍ 사 업 량 : 도로정비 L=1km, 사면정비 A=11,632㎡, 옹벽 L=1,143m

❍ 총사업비 : 18,200백만원 (2020년 1,000백만원)

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

❏ 추진실적

❍ 실시설계 용역 착수	: '19.  6월

❍ 원주지방국토관리청 하천공사 협의	:　'20.  4월

❍ 정선군 기술자문위원회 개최	: '20.  6월

❍ 정선군 방재신기술선정 심의위원회 개최	: '20.  6월

❍ 행정안전부 사전설계 검토	: '20.  9월

❍ 강원도 건설기술 심의	: '20. 10월

❏ 향후 추진계획

❍ 건설업사업관리 용역 발주	: '20. 11월

❍ 건설공사 발주	: '20. 11월

❍ 사업 착공	: '20. 12월

❍ 사업 준공	: '22. 12월

7		공공건축물 그린 리모델링 지원사업

□ 취약계층이 이용하는 공공건축물(어린이집, 보건소)의 에너지 성능 향상

및 실내공기질을 개선하고자 함

❏ 추진개요

❍ 사 업 명 : 공공건축물 그린리모델링 지원사업

❍ 사업기간 : 2020. 8. 1. ~ 2021.12.31.

❍ 사 업 비 : 1,946,240천원  (국비 70%, 도비 6%, 군비 24%)

(국비 1,362,369천원, 도비 116,774천원, 군비 467,097천원)

❍ 사업내용 : 단열보강, 창호교체, 환기·냉난방설비교체, 조명(LED)등

❍ 사업대상 : 8개소

구 분	대 상	비고(기준)
보건소(6)	고한사북보건지소, 신동보건지소, 광하보건진료소, 고성보건진료소, 광락보건진료소, 반천보건진료소	사용승인 이후 15년이 경과한 노후 공공건축물
어린이집(2)	정선어린이집, 사북어린이집

* 년도별 추진현황

‣ 2020년 사업대상(3개소) : 사북어린이집, 고한사북보건지소, 광하보건진료소

‣ 2021년 사업대상(5개소) : 정선어린이집, 신동보건지소, 고성·광락·반천진료소

❏ 추진실적

❍ 사업대상 및 예산 확정                      : 2020.  8월

❍ 설계발주 등 사업추진                       : 2020.  9월

❍ 국도비 보조금 신청                         : 2020. 10월

‣ 2020년 사업대상(3개소) 설계착수             : 2020. 10월

‣ 2021년 사업대상(5개소) 설계착수             : 2020. 11월 중

❏ 향후 추진계획

‣ 2020년 사업대상(3개소) 공사착수             : 2020. 11월 중

‣ 2021년 사업대상(5개소) 공사착수             : 2021.  3월 중