개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

아리아라리 대외 홍보 공연

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평창동계올림픽 레거시 아리아라리 대외 홍보

○ 정선아리랑 홍보를 통한 문화유산적 가치 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 2020 .12. 31. (10. 18. ~ 10. 25.)

○ 위 치 : 서울 종로구 대학로 유니플렉스 1관

○ 규 모 : 아리아라리 공연 8회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :       200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	200			200
국 비
시 도 비	0.6			0.6
시군구비	1.4			1.4
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년도 예산확보 추진 : 2019. 6.

○ 아리아라리 대외 홍보 사업 기본계획 수립 : 2019. 7.

○ 아리아라리 대외 홍보 사업 실행계획 수립 : 2019. 10.

○ 아리아라리 대외 홍보 사업 : 2020. 1. ~ 2020. 12. 31.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○당초 2019년 6. 1. ~ 2020. 12. 31.까지 국립부산국악원에서 사업을 실행하려 했으나, 이월해서 2020년도에 서울 대학로에서 사업을 집행함

사업명

정선군 골프연습장 조성사업

담당자

문화관광과 최형준(☎560-2547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 생활수준 향상 및 골프 대중화로 인한 골프 수요 증가로 정선군 골프연습장을 건립하여 생활체육 기반시설을 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 애산리 786

○ 규 모 : 골프연습장 1동(A=1,748.14㎡, 지상 3층, 40타석, L=170m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	0	0	1,333	3,667
국 비	1,425	0	0	400	1,025
시 도 비	998	0	0	280	718
시군구비	2,577	0	0	653	1,924
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 정선군종합경기장 군관리계획(변경) 및 조성계획(변경) : 2021. 1월 ~ 5월

○ 공공건축 사업계획 사전검토 : 2021. 4월 ∼ 5월

○ 설계공모(제안공모) : 2021. 6. 3. ~ 7. 9.

○ 실시설계 : 2021. 7월 ~ 11월

□ 향후계획

○ 공사발주 및 착공 : 2021. 12월

○ 공사 준공 : 2022. 10월

사업명

사북 생활체육공원 조성사업

담당자

문화관광과 유진영(☎560-2083)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북읍 지역의 부족한 생활체육시설 기반확충으로 동호인대회 개최 및  체육교류 활성화에 따른 지역경제 성장도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년(2년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 98-1(구 북일정수장)

○ 규 모 : A=6,400㎡(풋살장 1면, 다목적구장 1면, 부대시설 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	1,500	1,500
국 비	900	0	0	450	450
시 도 비	630	0	0	315	315
시군구비	1,470	0	0	735	735
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 실시설계 용역              : ‘21. 2월 ~ 5월

○ 소규모재해영향평가 용역    : ’21. 3월 ~ 8월

○ 일상감사/도 계약심사 완료 : ’21. 6월

○ 공사 착공                 : ’21. 8월

□ 향후계획

○ 공사 추진                 : ‘21. 8월 ~ ’22. 9월

○ 사업완료 및 정산          : ‘22. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

가리왕산 뮤직페스티벌

담당자

문화관광과 신남이(☎560-2138)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽 유산인 가리왕산 알파인스키장의 합리적 복원과 더불어 생태관광지 활용을 통한 새로운 문화관광 상품으로서의 가치 도출

○ 군민의 문화예술 향유 기회 제공 및 지역경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7월 ~ 9월 <행사 예정일 8. 21.(금) ~ 8. 22.(토)>

○ 위 치 : 정선군 북평면 가리왕산 알파인스키장 부지 일원

○ 규 모 : 가리왕산 뮤직페스티벌, 정선 토속음식 및 숲 힐링(명상) 등 웰니스 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	596.6		16.6	290	290
국 비
시 도 비
시군구비	596.6		16.6	290	290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2020년도 예산확보 추진 : 2019. 11.

○ 가리왕산 뮤직페스티벌 기본계획 수립 : 2020. 2.

○ 가리왕산 뮤직페스티벌 기본계획 실행계획 수립, 사업비 교부 : 2020. 5.

○ 가리왕산 뮤직페스티벌 취소 결정 : 2020. 8.

□ 향후계획

○ 정선 웰니스 관광에 대한 SNS 홍보를 통한 포스트코로나 대비 사업추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 수도권 중심의 코로나19 재확산과 정부의 사회적거리두리 2단계 격상 시행에 따른 축제 취소

사업명

정선 아리랑 마을 조성 사업

담당자

문화관광과 장선웅(☎560-2569)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선군 대표 콘텐츠인 5일장과 아리랑을 테마로 레트로한 마을여행 콘텐츠 조성을 통한 지역관광 활성화.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 일원

○ 규 모

- 핵심 사업 (아리랑마을 구성, 투어코스 및 브랜드 개발 및 마케팅)

- 관리운영 사업 (DMO 구축 및 관광 비즈니스 육성)

- 인프라 개선 사업(레트로 간판 정비 및 야간 골목길 조명 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계				200	11,800
국 비				100	5,900
시 도 비				30	1,770
시군구비				70	4,130
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 문체부 계획공모형 지역관광 개발사업 공모 선정 및 컨설팅 : ‘20. 3월 ~ 9월

○ 정선 아리랑마을 조성사업 기본계획 수립        : ’20. 10월 ~ 21. 8월

□ 향후계획

○ 사업 실시설계  : ‘20. 9월 ~ 12월

○ 핵심·관리운영·인프라개선 연차별 사업 추진 : ’22년 ~ ‘24년

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 문체부 공모 사업 예산 변경

- 당초 : 19,800백만원 → 12,000백만원 (감 7,800백만원)

사업명

민둥산복합스포츠센터 조성사업

담당자

문화관광과 전찬복(☎560-2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활SOC복합화(국민체육센터 + 생활문화센터) 사업을 지역 실정에 맞게

조성함으로서 주민 여가활용 공간조성과 건강증진에 기여함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 정선군 남면 무릉리 421-5번지 일원

○ 규 모 : 복합스포츠센터 1동( 지상 3층, 연면적 2,300㎡)

- 1층: 생활문화센터, 2~3층: 근린생활형 국민체육센터

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000			1,200	4,800
국 비	2,100	0	0	600	1,500
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,900	0	0	600	3,300
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 공공건축 사업계획 사전검토: 2021. 3월

○ 설계 제안공모 : 2021. 5월

○ 실시설계 : 2021. 6월 ~ 11월

□ 향후계획

○ 공사발주 : 2021. 12월

○ 공사착공 : 2022. 3월

○ 공사준공 : 2022. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초(투자심사)	변경 후	증 감	비 고
총 사업비	6,900백만원	6,000백만원	△900백만원	보조사업비 조정

사업명

정선문화원 증축

담당자

문화관광과 신연길(☎560-2549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 83년 설립된 문화원은 현재 회원수530여명에 연평균 11개의 프로그램을       운영중에 있으나, 운영공간이 매우 협소한 실정

○ 이에, 노후화된 지방문화원 이전 신축으로 지역문화 창달과 문화예술 활       성화를 도모하고자 증축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2022

○ 위 치 : 정선읍 봉양리 261외 1필지

○ 규 모 : 철근콘크리트 연면적 약 1,200㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비					1,200
시군구비					1,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정투자심사 완료                           : ‘20. 8월

○ 증축부지 최종확보                               : ‘21. 8월

○ 공공건축심의 사전검토 신청                      : ‘21. 8월

□ 향후계획

○ 공유재산관리계획 심의                          : ‘21. 9월

○ 기본 및 실시설계 용역                          : ‘21. 9월~12월

○ 착공 및 준공                                   : ‘22. 3월~12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업위치 및 사업규모 변경

구 분	당 초	변 경 후	증 감	비 고
사업규모	900㎡	1,200㎡	300㎡
사업위치	봉양리261외1필지	봉양리262외1필지(1차)봉양리261외1필지(2차)

사업명

공립 치매전담형 요양시설 신축

담당자

복지과 이명아(☎560-2975)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급속한 고령화로 인한 치매인구 증가로 치매관리 전담시설 확충 필요

○ 부양가족의 부담을 경감하고 국가가 함께하는 돌봄 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 11. ~ 2021. 12. 31.

○ 위 치 : 정선군 정선읍 신월리 896-4 외 5필지

○ 규 모 : 요양시설 신축 1동 (정원57명, 연면적1,882㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800			150	5,650
국 비	2,400			120	2,300
시 도 비	600			30	550
시군구비	2,800				2,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○기본 및 실시설계 완료

○계약심사 및 일상감사 완료, 건축협의 및 실시계획인가(변경) 중임.

□ 향후계획

○ 입찰 및 계약절차 진행

○ 공사착공 및 수탁기관 선정

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	연면적1,682㎡	연면적1,882㎡	1,2인실 요양실 증설
총사업비	58억원	75억원
사업기간	2020~2021	2020~2022

사업명

고한읍 고한8리 20리 주차타워 조성사업

담당자

안전과 전제헌(☎560-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 고한8리 20리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소

및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 63-40

○ 규 모 : 연면적2,948.44㎡(지상3층), 건축면적 1,474.22㎡

철근콘크리트조, 주차대수 139대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	0	0	2,000	3,500
국 비	2,000			1,000	1,000
시 도 비	1,050			300	750
시군구비	2,450			700	1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 생활SOC 수요 조사 제출                        : ‘19. 02월

○ 주차타워 조성 타당성 조사 용역                 : ‘19. 07월

○ 지방재정 투자 심사(도)                          : ‘19. 11월

○ 주차타워 조성부지 지반조사 용역                : ‘19. 12월

○ 기본 및 실시설계용역                           : ‘21. 04월

○ 일상감사 및 계약심사                           : ‘21. 08월

□ 향후계획

○ 건축 관련 인허가                               : ’21. 09월

○ 공사 입찰공고 및 계약 체결                     : ’21. 09월

○ 공사 착공                                      : ’21. 09월

○ 공사 준공                                      : ’22. 07월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

국가생태문화탐방로 조성사업

담당자

환경과박순희(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강유역 생태·경관보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태       문화탐방로 조성으로 상생발전 도모 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년(6년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 광하리 ~ 신동읍 덕천리

○ 규 모 : 탐방로 조성 전체 34km(정선군 25km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,000	656	956	488	3,900
국 비	3,000	328	478	244	1,950
시 도 비	600	66	96	48	390
시군구비	2,400	262	382	196	1,560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 타당성 검토 및 실시설계 추진                   : ‘16. 11월

○ 생태경관보전지역 내 행위허가 완료              : ‘17. 12월

○ 귤암쉼터 조성사업 준공                         : ‘18. 6월

○ 탐방로(나리소), 탐방센터(연포분교) 조성사업 준공 : ‘19. 12월

○ 탐방로(가수리, 고성리) 실시설계 및 준공         : ’20. 7월 ~12월

○ 각종 인허가 추진                               : ‘21. 5월

○ 탐방로(가수리,고성리) 공사 추진                 : ’21. 8월~11월

□ 향후계획

○ 탐방로(가수리,고성리) 공사 준공                 : ‘21. 11월

○ 탐방로(가수리) 잔여구간 공사 추진              : ’22. 4월~10월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2016~2021년,  변경 : 2016년~2022년

사업명

병방산 하늘꽃마을조성사업

담당자

환경과박순희(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동강 주변의 우수한 수변자원과 산림자원을 활용한 체험 생태탐방단지

조성 및 병방산 군립공원 자연체험시설 관광자원과 연계한 2단계 확충

사업 추진으로 관광객 유치증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 병방산 군립공원 일원

○ 규 모 : 천상의 산책로, 꽃과별 체험관, 주차장, 하늘꽃 광장조성,

녹색알리미의 집(홍보관 및 치유센터) 등 조성 (A=24,100㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,800	0	0	400	7,400
국 비	3,900	0	0	200	3,700
시 도 비	1,170	0	0	60	1,110
시군구비	2,730	0	0	140	2,590
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 타당성 검토 및  기본계획 수립                 : ‘18.  1월

○ 지방재정 투자심사(강원도) 완료                 : ‘18.  6월

○ 사업대상지내 사유지 보상협의 완료             : ‘20.  5월

○ 실시설계용역 (토목, 조경분) 착수               : ‘20. 10월

□ 향후계획

○ 실시설계용역 (토목, 조경분) 준공               : ‘21. 11월

○ 실시설계용역 (건축분) 추진                    : ’21. 11월~ ’22. 3월

○ 하늘꽃광장, 천상의 산책로, 주차장 조성 추진     : ’22. 3월 ~ 12월

○ 녹색알리미의 집, 꽃과별 체험관 추진           : ’22. 4월 ~ 12월

□ 사업변경 내역 (해당 없음)

사업명

동강녹색 모험의 숲 조성

담당자

환경과 박순희(☎560-2330)

□ 사업목적 및 필요성

○ 병방산 군립공원 일원의 수려한 산림자원과 동강 주변의 우수한 수변자원을

활용하여 관광트렌드 변화에 대응하는 녹색 휴양 레포츠단지 조성으로 지역       경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년(8년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 병방산 군립공원 및 모평문화공원 일원

○ 규 모 : 친수공간 및 야영장 조성, 솔치유공간, 어드벤처 코스 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,740	7,556	652	1,532	-
국 비	4,870	3,778	326	766	-
시 도 비	1,461	1,133	98	230	-
시군구비	3,409	2,645	228	536	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 지방재정 투자심사(조건부)            : 2013. 11월

○ 트래킹코스 정비사업 완료            : 2014. 12월

○ 지방재정 투자심사(적정)              : 2015. 10월

○ 친수공간 및 야영장 조성 완료        : 2016. 12월

○ 군립공원 공원계획 변경              : 2017. 6월

○ 솔치유공간, 에코어드벤쳐 조성 완료  : 2019. 6월

○ 숲속야영장(글램핑), 짚라인 조성 완료 : 2020. 3월

○ 시설보강공사 완료                   : 2020. 10월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

용탄천 생태하천복원사업

담당자

환경과 강윤혜(☎560-2910)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용탄천 물길 및 생태복원으로 하천 자생력, 생태적 기능, 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2023년(7년)

○ 위 치 : 정선군 회동리(회동3교)~ 용탄리(월평교)

○ 규 모 : 1.75㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,505백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,505	8,500	6,450	0	4,555
국 비	4,000	4,000	0	0
시 도 비	5,752.50	0	2,000	0	3,752.5
시군구비	2,925.75	1,700	600	0	625.75
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	6,826.75	2,800	3,850	0	176.75

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수            : 2017. 5월

○ 용탄천 하천기본계획 변경 고시         : 2019. 8월

○ 정선군 생태하천 복원계획 변경         : 2020. 9월

○ 원주환경청 기본 및 실시설계 기술검토  : 2021. 1월~

□ 향후계획

○ 강원도 생태하천 심의                             : 2021.  9월

○ 편입토지 보상협의                                : 2021. 11월

○ 시설공사 착공                                    : 2021. 12월

□ 사업변경 내역                                           (단위 : 백만원)

항 목	주요내용
	변경 전	변경 후
총 사업비	19,000	19,505
사업기간	2017~2020	2017~2023
사업구간	회동리 회동3교 ~ 용탄리 남한강(동강) 합류점(L=5㎞)	회동리 회동3교 ~ 용탄리 월평교(L=1.75㎞)

사업명

정선군 골지천유역 침사지 비점오염저감사업

담당자

환경과 전충의(☎560-2915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임계면 임계리 비점오염물질을 저감하여 화천동천 및 큰골천 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년(5년)

○ 위 치 : 정선군 임계면 임계리 48-76일원

○ 규 모 : 침사지(7,900㎥), 개비온(6,003m), 우회수로(1,608m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7600	6880.4	0
국 비	5,320	4,816.3	0
시 도 비	342	309.6	0	해당없음
시군구비	342	309.6	0
지 방 채
민간자본
기 타	1,596	1,444.9	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수            : 2016.  6월

○ 골지천유역 비점오염저감사업 착공      : 2019.  6월

○ 골지천유역 비점오염저감사업 사업완료  : 2020. 12월

□ 향후계획

○ 골지천유역(임계지구) 비점오염 저감시설 운영

□ 사업변경 내역                                           (단위 : 백만원)

항 목	주요내용
	변경 전	1차변경	2차변경	최종변경
사업기간	2020.9월	2020.9월	2020.12월	2020.12월
사업내용	침사지 7,900㎥ 개비온 6,170m 우회수로 1,575m 사면보호 8㎡	침사지 7,900㎥ 개비온 6,216m 우회수로 1,888m 사면보호 718㎡	침사지 7,900㎥ 개비온 6,740m 우회수로 1,883m	침사지 7,900㎥ 개비온 6,003m 우회수로 1,608m

사업명

도로와 지하시설물(상하수도) DB구축 사업

담당자

민원과 정의진(☎560-2183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로와 지하시설물(상·하수도) 전산화로 지하시설물의 체계적인 관리를       통한 각종 안전사고 예방 및 중복투자 방지로 예산절감 효과 등에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년(6년)

○ 위 치 : 정선읍, 고한읍, 사북읍

○ 규 모 : 도로 및 상·하수 시설 467㎞ DB 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,529 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,529	1,118	270	1,141
국 비	1,517	670	162	685
시 도 비
시군구비	1,012	448	108	456
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 3개읍 지역의 도로 및 상·하수 시설에 대한 전산화 완료

※ 국비보조사업 종료

□ 향후계획

○ 미구축 지역인 6개 읍·면에 대하여 확산사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 2015년 ~ 2017년, 변경 2015년 ~ 2020년

- 변경사유 : 국비보조금 지연에 따른 사업기간 연장

사업명

사북 도시재생 뉴딜사업

담당자

도시과 신성철(☎560-2955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소규모 주민생활 밀착형 공공시설 공급과 자발적 주거환경 개선 유도를 통해 쇠퇴한 폐광지역의 주거복지 실현 및 공동체 활성화, 지역경쟁력 회복 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2021년 *2022년 까지로 계획 변경 추진 중

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리 313-7 일원

○ 규 모 : 3개 분야 9개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,585백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,585	4,300	3,494	1,791
국 비	4,500	2,100	1,550	850
시 도 비	420	420
시군구비	4,510	1,780	1,944	786
지 방 채
민간자본	155			155
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 도시재생 뉴딜 공모사업 최종 선정     : 18. 8월

○ 실행계획 승인(국토교통부)             : 19. 9월

○ 실시설계용역 완료                    : 20. 6월

○ 강원도 계약심사 의뢰                 : 20. 7월

○ 시설공사 계약 및 발주(강원도개발공사) : 20. 8월

○ 시설공사 착공                        : 20. 9월

□ 향후계획

○ 실행계획 변경 추진(실타평가 21. 9월, 특위 심의 21.10월)

○ 시설공사 준공                        : 21.12월

○ 집수리 2차 및 SW사업 추진           : 22. 1월~12월

□ 사업변경 내역(계획변경 추진 중)

변경 내역	당초	변경	변 경 사 유
사업기간 변경 (1년 연장)	2019년~2021년	2019년~2022년	세부사업(집수리) 추가수요 및 SW사업 추진을 위한 기간 연장

사업명

고한 소1-21호(고토일) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한14리 고토일 일원 도로 확포장을 통한 주민통행불편 해소와 도시기반       시설 확충으로 주민 정주여건 개선 및 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 169-1번지 ~ 산 55-7번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500				3,500
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	-	-	-	3,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

○ 주민설명회                  : 2020. 2월

○ 사전검토용역                : 2019. 08월 ~ 10월

○ 보상협의 주민의견 수렴      : 2020. 10월 ~11월

□ 향후계획

○ 실시설계용역                : 2021. 1월 ~ 2021. 4월

○ 손실보상협의                : 2021. 4월 ~ 6월

○ 공사추진                    : 2021. 6월 ~ 12월

사업명

고한 소3-11호(상갈래) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 상갈래 일원 도시계획시설(도로) 미개설로 인한 주민생활불편이       지속되고, 주택 밀집지역 화재 발생시 소방차 진입이 어려움에 따라 도로       개설을 통하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 주민정주여건을 개선하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 274-18번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=250m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	1,000	950	500	1,050
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	1,000	950	500	1,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 실시설계용역 추진            : 2019. 1월 ~ 11월

○ 주민설명회 개최              : 2019. 8월

○ 감정평가                     : 2019. 11월

○ 보상협의                     : 2020. 1월 ~

○ 석면조사용역                 : 2021. 8월

□ 향후계획

○ 지장물 철거공사 추진         : 2021. 9월 ~ 12월

○ 본공사(도로) 추진            : 2022. 3월 ~ 12월

사업명

군도7호(사북~직전) 접속도로 개설

담당자

도시과 이정근(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북 ~ 직전간 군도7호 개통예정에 따른 사북중심시가지 유입의 차량증가가       예상됨에 따라, 시가지 진입로 확포장을 통한 접근성을 향상시키고 보다       안전하고 편리한 교통인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 사북읍 사북리 307-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=140m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,900			2,300	2,600
국 비
시 도 비
시군구비	4,900	-	-	2,300	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 실시설계용역                 : 2020. 10월 ~ 2021. 3월

○ 감정평가                     : 2021. 2월

○ 보상협의                     : 2021. 2월 ~

○ 공사발주                     : 2021. 8월

□ 향후계획

○ 공사추진                     : 2021. 9월 ~ 2022. 6월

사업명

정선읍 상권르네상스 사업

담당자

경제과 이기영(☎560-2355)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선읍 상권 쇠퇴로 골목상권 소상공인 생업 기반이 약화되는 등 지역경제에 부정적인 영향을 미치게 됨에 따라 상권전반의 종합적 지원을 통해 소상공인 및 지역상권의 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년(사업종료 2025.03.31)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 일원(4개 상권 : 정선역, 터미널, 시장, 약초상가)

○ 규 모 : 4개 분야 10개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	1,682.9	2,033.9	4,283.2
국 비	4,000	-	841.45	1,016.95	2,141.6
시 도 비	4,000	-	841.45	1,016.95	2,141.6
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 체류형 관광인프라 거점 조성(로컬라운지, 게스트하우스 등) : `20.4.~`21.3.

○ 특화 거리 조성(아리랑테마거리, 보부상로드, 사인물 정비 등) : `20.8.~`21.3.

○ 소상공인 역량 강화(소상공인 교육·컨설팅, 상권빅데이터 분석) : `20.9.~`21.3.

○ 테마존 운영(플리마켓, 상권스토리텔링 개발, 홍보마케팅 등) : `20.9.~`21.3.

○ 코로나19 대응(클린점포 지정, 심장충격기 및 방역물품 구입 등) : `20.9.~`21.3.

□ 향후계획

○ 2년차 사업의 순차 추진 : 2021.04. ~ 2022.03.

□ 사업변경 내역

사업명	추진시기		비고
	당초	현재
테마형 복합문화공간 조성(현 약초시장)	1·2·3년차 추진	1·3·4·5년차 추진	사업 추진일정 변경

사업명

아리아리 이음 플렛폼 조성

담당자

여성청소년과 송윤민(☎560-2185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 관내 운영 중인 도서관이(공립 1개소, 교육도서관 1개소) 건립된 지 20년이 경과되어 시설 노후와 협소한 공간구조로 이용자들의 정보욕구 및 도서관 이용 수요 증가로 도서관 시설 확충이 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3년)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 54-7

○ 규 모 : 복합건물 1동(A=2,900㎡) - 지하1층, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,279 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,279	-	2,540	2,540	4,199
국 비	3,841	-	1,270	1,270	1,301
시 도 비	1,143	-	0	762	1,143
시군구비	4,295	-	1,270	508	1,755
지 방 채			0	0
민간자본			0	0
기 타			0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 기본계획 수립                              : ‘20. 03.

○ 2018년 제6회 공유재산심의회 의결           : ‘21. 11.

○ 강원도 2019년 제3차 지방재정 투자심사 완료   : ‘19. 10.

○ 기본 및 실시설계 진행 중                   : ‘20. 08.

□ 향후계획

○ 강원도 건설기술 심의           : ’21. 08.

○ 건축허가, 일상감사 및 계약심사 : ‘21. 09.

○ 착공                           : ’21. 10.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고한복합문화센터 건립

담당자

여성청소년과 장은영(☎560-2943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화 활동 진흥과 주차난 해소를 위해 생활문화센터, 주차장을 포함한 복합문화센터를 건립하고, 시가지와 주거단지 사이의 주민 이동 편의성을 향상시키기 위해 보행교를 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 274-13

○ 규 모 : 신축 1동(지상 7층) / A=4,840.11㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,139백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,139	-	350	4,795	6,994
국 비	2,323		96	1,453	774
시 도 비	284		-	189	95
시군구비	9,532		254	3,153	6,125
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계용역 실시         : ‘20. 05.~’20. 12.

○ 2021년 제1차 강원도 투자심사 실시 : ‘21. 02.

○ 신축공사 착공                     : ’21. 08.

□ 향후계획

○ 신축공사 준공 : ‘22. 08.

○ 센터 개관     : ’22. 10.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업규모	A=3,300㎡(지상6층)	A=4,840.11㎡(지상7층)

사업명

정선군 가족센터 건립

담당자

여성청소년과 이소연(☎560-2316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중심의 보편적 가족서비스 제공에 대해 주민들의 욕구를 충족시키고,       주변 주거지 밀집으로 인한 골목길 불법주차 등 심각한 주차문제 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 54-7

○ 규 모 : A=1,800㎡(지상2층), 주거지주차장 2,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,500	500	0	2,666	5,334
국 비	2,700	0	0	900	1,800
시 도 비	990	0	0	330	660
시군구비	4,810	500	0	1,436	2,874
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 대행사업협약 체결(정선군, 강원도개발공사) : ‘20. 3.

○ 공공건축 사전심의                        : ’20. 5.

○ 기본 및 실시 설계용역 착수               : ‘20. 9. ~ ’21. 9.

○ 건설기술심의완료                         : ’21. 8.

□ 향후계획

○ 공사착공 : ‘21. 10.

○ 공사준공 : ’23. 6.

○ 개    관 : ‘23. 7.

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2020~2022	2020~2023

사업명

사북공공도서관 리모델링 사업

담당자

여성청소년과 전봄이(☎560-2015)

□ 사업목적 및 필요성

○ 98년 개관 이후 노후된 사북공공도서관의 교육환경 개선과 주민의 복지       향상을 위해 리모델링 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4.~2020. 10.

○ 위 치 : 정선군 사북읍 파랑새길 33(사북공공도서관)

○ 규 모 : 노후 건물 리모델링공사(A=1,380㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,098		12	2,086
국 비	400			400
시 도 비	216		12	204
시군구비	1,084			1,084
지 방 채
민간자본
기 타	398			398

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업준공 : ‘20. 10. 19.

○ 재 개 관 : ’20. 10. 28.

○ 정산보고 : ‘21. 01. 26.

□ 향후계획

○ 도서관 시설 운영

□ 사업변경 내역                                        (단위 : 백만원)

구 분	당초	변경	비고
사업금액	2,180	2,100