사업수행능력평가서 작성지침

【 정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역】

2003. 08.

사업수행능력평가서 작성지침

1. 용  역  명 : 정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역

2. 사업의 목적 : 본 지침은 정선군에서 시행할 □정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역□ 입찰에 참가할 감리용역업체를 건설기술관리법 시행령 제38조에 의거 선정함에 따른 평가자료 내용과 제출방법에 관한 안내사항을 기술한 것임.

3. 용역개요

가. 위    치 : 강원도 정선군 정선읍 북실리 828-2번지 일원

나. 공사개요

하수처리시설 : Q = 3,000□/일

차집관거 : (D = 200□∼500mm) L = 6.7□

다. 용역기간 : 착수일로부터 24개월간(시운전기간 포함)

라. 용역금액 : 1,236,800천원(부가세포함)

마. 시행기관 : 정선군

바. 시행방법 : 장기계속사업

4. 업체선정방법

가. 입찰참가 대상업체 선정기준

건설기술관리법 제21조, 같은법시행령 제38조 및 같은법시행규칙 제13조제1항의 규정에 의한 용역업체의 사업수행능력을 평가하여 입찰참가 대상업체에 한하여 지명경쟁입찰 □ 국가를당사자로하는계약에 관한 법률시행령 제42조의 규정에 의거 낙찰자 선정

나. 낙찰자 선정절차

안내공고		□			참가등록 및 작성지침서교부					□		사업수행능력 평가서 제출						□	사업수행능력 평가
□	업체선정			□			경쟁입찰		□		낙찰예정업체 선정					□	적격심사					□	계 약

다. 수행능력 평가기준

1) 참가업체가 제출한 평가자료를 근거로 한다.

2) 평가항목 및 배점기준은 건설기술관리법 시행규칙 제13조제1항의 기준에 의거 우리 군에서 정한 평가기준에 따라 정함.

라. 사업수행능력평가서 제출기한 및 장소

1) 사업수행능력평가 안내서 교부 : 인터넷 게시

- 기간 : 2003년09월04일 ∼ 2003년09월22일

- 주소 : http://www.jeongseon.go.kr/(정선군청 홈페이지)

(입찰정보∀용역사업집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내공고 첨부파일)

2) 등록 및 사업수행능력평가서 제출기한 : 2003년09월22일 (09:00∼18:00까지)

3) 사업수행능력평가서 제출 부수 : 2부

4) 참가등록 및 사업수행능력평가서 제출장소 : 정선군 도시교통과 하수도팀.

5) 사업수행능력평가서 제출: 2부(원본 1부), 작업계획 및 기법은 2부 별책

마. 입찰 참가 대상자 선정 통보

1) 선정된 업체에 한하여 개별통보

5. 사업수행능력평가서 작성요령

가. 배치인원

- 상주 감리원   : 책임감리원 1인(감리사), 보조감리원 5인(감리사1인, 감리사보4인)

- 비상주감리원 : 상하수도, 토질및기초, 토목구조, 건축, 기계, 전기/계장, 조경분야 각1인

나. 평가대상

- 책임감리원 1인, 보조감리원 3인(건축1인, 기계1인, 전기1인), 비상주감리원(상하수도분야) 1인, 총 5인에 대하여 평가

다. 제출서식 및 양식

1) 용역참가신청서(공문) : (서식 1)

2) 사업수행능력 평가서(표지) (양식 1)

3) 참가신청서 (양식 2)

4) 각서 (양식 3)

5) 참여감리원 조직표 (양식 4)

6) 참여감리원 총괄표 (양식 5)

7) 참여기술자 자격, 경력, 실적 (양식 6)

8) 유사용역 수행실적(양식 7)

9) 전차용역 관련사항(양식 8)

10) 입찰참가제한 및 업무정지등(양식 9)

11) 재정상태 건실도(양식 10)

12) 기술개발 및 투자실적(양식 11)

13) 참여감리원의 수행중인 사업현황(양식 12)

14) 교체빈도(양식 13)

15) 상훈·부실벌점 관련 가·감점(양식 14)

16) 참여기술자 교육실적(양식 15)

17) 작업계획 및 기법(양식 16)

6. 인쇄 및 제본방법

가. 규격 및 제본

1) 규 격 : A4 (210mm / 296mm)

2) 지 질 : 백상지 (80g/□)

나. 인쇄방법

1) 표  지 : 백상아트지(150g/□, 무광택)

2) 제  본 : 양면좌철(작업계획 및 기법은 단면)

3) 공판인쇄 또는 전자조판 인쇄

7. 기타사항

가. 사업수행능력평가서에 기재된 내용과 구비서류의 내용이 서로 다르거나 허위임이 발견될 경우에는 우리군에서 임의 처리함.(요구한 양식과 상이할 경우 1건당 0.5점이내 감점 처리함)

나.  업체제출 양식 내용기재나 확인증빙서류의 판단해석 등에 차이가 있을시는 발주처의 의견에 따릅니다.

다. 사업수행능력평가서 작성에 필요한 비용은 작성자가 부담하며 제출된 서류는 반환하지 않습니다.

〔서식 1〕용역참가 신청서(공문)

( 업    체    명 )

2003년  월   일

문서번호 :

받    음 : 정 선 군 수

참    조 : 도시교통과장

제    목 : 책임감리용역 사업수행능력평가서 제출

1. 귀 군에서 시행하는 □정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역□에 대한 사업수행능력을 평가받기 위하여 용역 참가를 신청합니다.

2. 구비서류 또는 수행능력 평가서의 허위기재 및 부실한 자료작성 등이 있을 경우에는 평가상의 불이익은 물론 낙찰취소, 부정당 업자로 제재, 또는 본 입찰참가 대상자에서 제외 등의 여하한 처분도 감수하고 이의 제기하지 않을 것임을 확약하오며 이에 본 사업수행능력평가서를 작성하여 제출합니다.

붙  임 : 사업수행능력평가서 2부.  끝.

주    소 :

업 체 명 :

대표이사 :

전화번호 및 FAX번호

[양식 1]

접수번호

사업수행능력평가서

【 정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역】

2003. 08.

회    사    명

[양식 2]

참  가  신  청  서

수  신 : 정선군수

참  조 : 도시교통과장

제  목 : 참 가 신 청 서

정선읍 하수처리시설 건설사업 전면책임감리용역에 참여하고자 붙임과 같이 사업수행능력평가서를 제출합니다.

2003년  월   일

회 사 명 :

대 표 자 :                 (인)

전화번호 :

[양식 3]

각          서

용  역  명 :  정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역

본 업체는 귀 군에서 발주하는 상기 용역 입찰참가자격 심사를 위한 수행능력 평가자료를 제출함에 있어 평가자료의 허위기재 또는 부실한 자료작성 및 중대한 오류로 인하여 발주자의 공정한 평가를 저해한 경우에는 평가대상에서 제외 또는 관계법령에 따른 귀 군의 어떠한 조치에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 각서로 서약합니다.

2003년    월    일

업  체   명

대 표 이 사

전 화 번 호

정선군수귀하

[양식 4]

참여감리원 조직표

					책임감리원(평가) (감리사)
																			비상주감리원(7인)
																			□상·하수도분야(평가) □토질및기초분야(비평가) □토목구조분야(비평가) 건축분야(비평가) 기계분야(비평가) 전기/계장분야(비평가) 조경분야(비평가)□
																			□비상주감리원은 감리사 이상으로 작성
	토 목			건축					기계					전기/계장
	감리사보2인 (미평가)			감리사보1인 (평가)					감리사1인 (평가)					감리사보1인 (평가)

- 비상주감리원을 포함하여 작성

- 상기 인원 이상으로 작성을 요함.

- 감리시행중 공사 및 공정 여건에 따라 편성된 인원을 조정, 배치할 수 있으며, 이 경우 동등이상의 기술자로 사유를 명시하여 우리 군의 사전승인을 득한 후 시행하여야 한다.

[양식 5]

참여감리원 총괄표

구 분		성명	연령	최종 학력	자 격 증		경력 및 실적(년.월)			비 고
					종 류및 등록번호	취득일	해당 분야	직무 분야(Ⅰ)	직무 분야(Ⅱ)
상주감리원	책 임 감 리 원
	토목(감리사)
	보 조 감 리 원
	토 목
	건 축
	기 계
	전기/계장
비상주감리원	상하수도
	토질및기초
	토목구조
	건 축
	기 계
	전기/계장
	조 경

- 감리원은 책임감리원, 상주보조감리원, 비상주감리원으로 구분하여 작성한다.

- 경력년수는 실제업무수행 경력을 기재한다.

- 해당분야경력 기재 : 상주 감리원 : 하수도분야 설계,시공,감독,감리경력에 한하여 기재

비상주감리원 (상하수도분야) : 하수도분야 설계,시공,감독,감리경력 기재, 비평가인원은 성명만 기재

- 직무분야실적 기재 : 분야별 참여기술자의 전문직무분야의 설계, 시공, 건설사업관리,정밀안전진단, 감독,감리 실적 등에 대하여 기재(비상주감리원은 제외)

□비평가인원은 성명만 기재합니다(경력증명서 미첨부)

[양식 6]

참여감리원의 자격, 경력, 실적

□ 개인별 이력사항

성 명			근무부서				직 위
주민등록 번 호	- (만 세)		최종 학교	학 교			전 공 (학위)
				졸업일
자 격 증			취득일				총 경 력	년 월
							총공사비 100억이상 감리경력	년 월 □책임감리원만 작성
							해당분야경력	년 월
			종 류
							직무분야실적	년 월
근무기간		년 월	회 사			근무부서	직 위	비 고
-		( 년 월)	회사명 기록
합 계		년 월

□ 해당분야 경력

구 분		용역명	사업 개요	참여 기간 (일 수)	담당 업무	참여 등급	참여당시		발주처	비고
							소속 회사	직 위
상주감리원	설계,시공,,감독,감리
		계
비상주감리원	설계,시공,,감독,감리
		계

- 담당업무중 상주감리원은 책임감리원 또는 보조감리원으로 구분 작성

- 작성대상자는 평가대상감리원에 한하여 작성

- 총 경력은 건설기술자 경력증명서상 근무처경력 합계 기간을 기재한다.

- 상주감리원의 해당분야 경력

책임감리원  : 공고일 현재 하수도분야 설계,시공,감리,감독 경력

보조감리원 : 공고일 현재 하수도분야 설계,시공,감리,감독 경력

비상주감리원 : 상하수도 □  하수도분야 설계.시공.감독.감리 경력

- 감리해당일수를 기재하고 합계란 년 월은 건설기술자경력증명서상 참여용역별 참여일수 합계를 년 월로 환산 참여기간란에 기재한다.

□책임감리원은 건설기술관리법 시행규칙 제34조의2 규정에서 정한 경력을 확인할 수 있는 자료를 제출하여야하며, 미제출로 인하여 확인이 안 될 경우 평가대상에서 제외함

□ 직무분야 실적(상주감리원에 한하여 작성)

- 직무분야 실적은 아래양식에 의거 책임감리원 및 상주보조감리원에 한하여 구분 작성하며 해당 전문직무분야의 실적에 대하여 기재(비상주감리원은 작성 제외)

가. 직무분야실적Ⅰ(설계,시공,건설사업관리,정밀안전진단,감독,감리)

구 분	용역명	사업개요	참여기간 (일 수)	담당업무	참여등급	참여당시		발주처	비고
						소속회사	직 위
설계,건설사업관리,정밀안전진단 시공,감독,감리
계			년 월

나. 직무분야 실적 Ⅱ(시공,건설사업관리,정밀안전진단,감독,감리)

구 분	용역명	사업 개요	참여기간 (일 수)	담당업무	참여등급	참여당시		발주처	비 고
						소속회사	직 위
건설사업관리,정밀안전진단 시공,감독,감리
계			년 월

[양식 7]

유사용역 수행실적

구 분	용 역 명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
하수처리장 감 리 (해당분야)
소계				천원
일반하수도 분야 감리
소계				천원

□ 유의사항

1. 수행실적은 최근 3년간(공고일 기준) 정부, 지방자치단체, 공공기관에서 시행한 하수도 분야에 대한 감리용역에 한하여 작성(최종 준공된 실적만 평가 - 차수별 준공 및 수행중인 실적은 제외)

2. 하수처리장시설 감리란에는 3,000톤/일 이상의 규모에 한하여 기재

3. 감리용역실적은 공동도급으로 수행시는 참여비율에 의한 자사실적만 인정

4. 감리용역수행현황확인서에 등재된 사업에 한하여 실적으로 인정

5. 한국엔지니어링진흥협회, 한국건설감리협회증명서 또는 발주처의 실적증명서를 반드시 첨부.

[양식 8]

전차용역과의 관련

1. 감리전문회사 수행내용

용 역 명	개 요	용 역 비	용역 기간	발 주 처	책임기술자 성 명

- 본 사업의 전차용역은 『정선읍 하수종말처리시설 기본 및 실시설계용역』에 한함

- 해당없는 회사는 없슴으로 기재

2. 참여감리원

전차용역 참여여부			금차용역 참여여부
참여분야	성 명	주민등록번호	참여분야	성 명	비 고

- 전차용역 사업책임기술자 또는 분야별 참여기술자가 금차용역 감리원으로 참여시 기록

- 참여기술자 명단 실적증명서 사본 첨부

- 비고란에는 금차용역 참여내용을 명기

[양식 9]

입찰참가제한 및 업무정지등

□ 업 체

업체명	업무정지 및 제재기간	기 간(월)	조치기관명	사유요약	비 고
	∼
	∼
	∼
	∼

□ 참여감리원

감리원명	업무정지 및 제재기간	기 간(월)	조치기관명	사유요약	비 고
	~
	~
	~
	~

- 최근 1년간 관계법령에 따라 입찰참가 제한 또는 업무정지를 받은 기간을 합산기재

- 해당사항이 없는 회사는 □해당사항 없음□ 표시

- 한국건설감리협회에서 발행한 부실벌점 및 제재현황 원본 첨부.

[양식 10]

재정상태 건실도

□ 업체현황

구 분	기 재 사 항
1. 회 사 명
2. 설 립 년 도
3. 최근년도 경영실적
자 기 자 본
총 자 산
유 동 자 산
유 동 부 채

□ 자기자본비율 및 유동자산비율

구 분	최근년도	비 고
자본총계 (백만원)
자산총계 (백만원)
자기자본비율(%) = (자본총계/자산총계) □100
유동자산 (백만원)
유동부채 (백만원)
유동비율(%) =(유동자산/유동부채)□100

□ 첨부서류

1. 최근년도 결산보고서(결산공고문) 사본 첨부

2. 관할 세무서 확인을 받은 최근년도 재무제표 증명원(대차대조표, 손익계산서)

[양식 11]

건설 기술개발 및 투자실적

1. 기술개발실적

구 분	건 수	내 용	취득일	유효기간	비 고
신 기 술
	( )건
특 허
	( )건
실 용 신 안
	( )건
계	( )건

- 법 제18조의 규정에 의하여 지정된 건설신기술, 건설기술에 관한 특허등록결정  또는 실용신안(등록유지결정을 받은 경우에만 인정)을 받은 후 유효기간 내에  있는 경우 인정

- 기술개발실적이 동일 내용으로 건설신기술, 특허 또는 실용신안을 각각 받은 경우 가장 점수가 높은 1건만 인정

- 출원중 및 선등록인 신기술, 특허, 실용신안은 제외

- 타인이 보유한 신기술, 특허, 실용신안에 대한 등록권리의 양도, 대여, 사용권협약, 통상실시권의 경우 불인정(회사 자체개발 실적에 한하여 인정)

- 기술개발실적은 하수도분야의 자체기술개발 건수만 기재

- 상기 이외의 사항 기재시 해당배점의 최하점으로 평가

- 실적이 없는 회사는 동 양식에 “실적 없슴”으로 기재하여 제출

- 관련 증빙자료 사본 첨부

2. 투자실적

연도별	총 기술개발 투자실적	총 매출액	총투자금액 / 총매출액 비 율 (%)
2000
2001
2002
계	(백만원)	(백만원)	평 균 : %

- 최근 3년간 투자실적 기재

- 투자실적은 조세감면규제법 제17조 및 제18조 제2항에 의한 □기술 및 인력개발에  대한 세액공제□ 에 한하여 증빙서류 원본을 첨부 한다.

- 총매출액은 제무제표증명원상의 총매출액 적용(허위사실이 발견될 경우 임의 처리함.)

- 실적이 없는 회사는 동 양식에 □실적 없슴□으로 기재하여 제출

- 관할세무서장 발행 사실증명원 사본 첨부

3. 정보화 실적

구 분	정보화투자실적 (A)	기술개발투자실적 (B)	A/B
2002년	(백만원)	(백만원)	%

- 정보화 실적이라 함은 감리전문회사가 조세특례제한법시행령 별표5의 규정에 의한 제2호 다목 및 제10호에 준하여 투자한 비용을 말한다.

- 재무제표 또는 기술 및 인력개발비 지출에 관한 명세서에  정보화투자실적비로 명시되어 있는 경우에만 작성(해당사항 없으면 해당사항없음 표시).

- 공인회계사 또는 세무사가 증명한 최근 1개년 투자실적 제출

[양식 12]

참여감리원의 수행중인 사업현황

등급	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년월일 ∼ 년월일) (총 개월)	잔여기간 (□03년월일 ∼ 년월일) ( 개월)	참여 직책
책임
보조
비상주

□ 작성요령

1. 현재참여중인 모든 감리용역에 대하여 기재

2. 참여직책에는 상주, 비상주 여부 기재

3. 관련수탁기관에서 발급한 감리용역 수행현황 확인서의 진행중인 사업의 오류, 누락 사항 및 미등록사항에 대하여 수정 또는 추가하여 작성하며 비고란에 수정 또는 추가사유 기재하고 필요시 증빙자료 첨부

4. 총 용역금액 및 총 용역기간은 전체분 으로 기재

[양식 13]

교  체  빈  도

□ 감리전문회사

회 사 명	교 체 율(%)	배치총원	교체총원
	%	상 주 건 비상주 건	상 주 건 비상주 건

□ 공고일이후 발행된 한국건설감리협회의 □감리용역수행현황확인서□상의 교체율

기재부분 첨부 할 것(증빙과 상이한 경우 객관성 있는 자료와 산출근거 제시)

□ 평가대상 감리원의 교체빈도

등 급	성 명	용역명	발주기관	참여기간 (00년0월0일 ∼00년0월0일)	교체일	교체사유	비 고
책 임
보 조
비상주

□ 작성요령

1. 평가대상 감리원 전원에 대하여 작성

2. 최근 1년간 참여한 감리용역사업은 교체와 관계없이 모두 기재

3. 교체가 없는 경우 교체일과 교체사유는 □해당사항없음□으로 표기

4. 교체사유는 군입대, 부상(□개월 요양), 기타로 표기

□ 첨부서류

1. 감리 과업의 준공 또는 발주관서의 감리원 배치계획상 철수로 인한 경우에는 발주관서의 수행실적확인서 또는 배치계획상의 철수임을 증명할 수 있는 증빙 자료 첨부

[양식 14]

상훈, 부실벌점 관련 가□감점

□ 평가대상 참여감리원이 최근 1년간 하수종말처리장 감리업무와 관련하여 상훈을 받은 내용에 따라 평가

구 분	성 명	상훈번호	상훈일자	상훈내용	상훈기관	비 고
참 여 감리원

1. 발주청의 범위 : 국가기관, 시·군·구청장급이상의 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 1/2이상을 출자한 기업체의 장, 기타 건설기술관리법시행령 제3조의2에서 대통령령이 정하는 기관의 장.

2. 가점내용

- 발주처의 장:0.5점, - 국무총리·장관·감사원장:1점 - 대통령·포장·훈장 : 1.5점

□ 별첨 : 각 경력관리수탁기관의 확인서나 표창장 사본 첨부.

□ 참여업체 및 참여감리원이 최근 2년간 감리업무와 관련하여 받은 부실벌점에 따라 평가

구 분	최근 2년간 누계 평균 부실벌점	비 고
업 체
감 리 원

□ 별첨 : 부실벌점 확인서 사본 첨부

[양식 15]

참여기술자 교육실적(평가대상 감리원)

□ 평가대상 참여감리원이 최근 3년간(공고일 기준) 건설기술과 관련하여 이수한 교육실적

참여분야	성 명	교육이수번호	이수기간( 주)	교육훈련기관	비 고

□ 별첨 : 관련 교육이수증 사본 첨부

[양식 16]

작  업  계  획   및   기  법

【정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역】

1. 과업수행계획

2. 예상문제점·대책 및 착안사항

3. 기술자료활용방안

□ 내용은 단면 20쪽(표지제외) 이내로 2부를 작성하여 별권으로 제출(인쇄방법, 글자크기 등은 제한없슴)

[양식 17]

감리업무 수행계획 및 기법

구 분	수행계획작성 적정여부	점 수
과업수행계획	우 수 보 통 미 흡 미 제 출
작 업 기 법	우 수 보 통 미 흡 미 제 출
계

□ 표지양식 다음에 상기 양식 첨부할 것

□ <목       차>

제1장 과업수행 계획

□ 감리단 조직 및 업무분담, 관리계획

□ 품질관리 계획

□ 안전관리 계획

□ 시공관리 계획

□ 공정관리 계획

□ 환경관리 계획

□ 기타사항(준공후 업무인계·인수사항 등)

제2장 작업기법

□ 예상되는 문제점, 대책 및 착안사항

□ 기술자료 활용방안 등

주 : ① 감리업무수행계획 및 수법평가에 대한 평가자료는 20쪽이내(흑백 단면인쇄) 분량으로 제출.

- 규격 및 제본, 인쇄서체는 사업수행능력평가서 작성 기준에 준함

② 상기 목차를 준수하여 별책으로 작성토록 하고 표지 및 내용에 업체명 또는 업체를 알 수 있는 표기를 하지 말 것

사업수행능력 세부평가기준

【 정선읍 하수처리시설 건설공사 전면책임감리용역 】

2003. 08.

사업수행능력에 대한 평가방법 및 세부기준

Ⅰ. 일반사항

1. 참여감리원의 경력 및 실적은 감리원경력관리수탁기관 및 한국건설기술인협회의 확인을 받아야 하며, 유사용역 및 전차용역수행실적 등은 감리원경력관리수탁기관 또는 해당 용역 발주청의 확인을 받아야 한다.

2. 발주청은 사업수행능력(P.Q)평가시에는 관련서류의 사본 또는 참여감리전문회사가 작성한 서류를 활용한 후 P.Q평가에서 입찰참가자로 선정된 감리전문회사에 한하여 감리원경력관리수탁기관 또는 발주청이 발행한 서류를 제출 받아 경력사항 등을 확인할 수 있다.

3. P.Q평가결과 85.72점 이상인 업체중 상위 5개사를 선정하되 85.72점 이상인 업체가 5개사 미만일 경우는 85.72정 이상인 업체 모두를 입찰에 참여할 자로 선정한다.(미 선정업체는 개별통보하지 않음)

□ 단, 최종 선정된 감리전문회사가 1개사인 경우에는 재공고 한다.

4. P.Q평가에서 선정된 감리전문회사와 관련하여 평가점수에 영향을 미치는 상이한 부분이 발견되어 해당 감리전문회사를 입찰참가자 선정에서 제외하였을 경우 잔여 감리전문회사만을 입찰에 참여할 자로 선정한다.

5. 감리원 경력관리수탁기관등에서 발행하는 제반서류는 공고일 이후 발행된 확인서이어야 한다.

6. 이 기준을 적용함에 있어 기간계산 및 평가기준일은 입찰공고일을 기준으로 하며, 평가점수계산은 소수점 2째자리까지로 하고 소수점 3째자리에서 반올림한다.

7. 이 기준에 의한 점수 이외에 관계법령 등에서 규정하는 사항에 따라 필요하다고 인정되는 경우 가점 또는 감점을 줄 수 있으며, 평가결과 가점과 감점을 상계한 점수는 4점을 초과할 수 없고 가점과 감점을 합산한 총점이 100점 이상일 경우에는 100점으로 본다.

Ⅱ. 항목별 세부평가방법

1. 참여감리원의 평가는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 참여감리원의 자격은 영 제51조의2 별표 3에 의하여 기술자격자와 학력 또는 경력자에 의한 감리원을 등급별로 차등 평가한다.

나. 참여감리원은 책임감리원 1인과 상주보조감리원 3인 및 비상주감리원 1인 등 총 5인에 대하여 평가함을 원칙으로 한다.

다. 참여감리원의 경력은 자격취득시기, 자격보유 여부에 관계없이 평가분야의 설계, 시공, 감독 또는 감리수행 등의 경력 및 실적을 평가한다.

라. 해당분야 경력평가

책임감리원

정부□지방자치단체□정부투자기관에서 시행한 하수도분야설계·시공·감독□감리 경력

보조감리원

정부□지방자치단체□정부투자기관에서 시행한 하수도분야 설계·시공·감독감리경력

비상주감리원

정부□지방자치단체□정부투자기관에서 시행한 하수도분야 설계·시공·감독□감리경력

마. 직무분야 실적평가

직무분야 실적이라 함은 참여감리원의 직무분야(영 제4조 별표1 제3호 건설기술관련 기술분야 및 등급중 □직무분야□를 말한다. 이하 같다)에 해당하는 설계,건설사업관리,정밀안전진단,시공,감독,감리업무를 수행한 경력을 말하며, 설계□건설사업관리·정밀안전진단·시공□감독□감리 수행실적 및 건설사업관리·정밀안전진단·시공□감독□감리 수행실적으로 나누어 평가한다.

예시) 토목, 건축, 국토개발, 환경, 교통 등

바. 참여감리원이 발주청·감독기관 또는 건설관련업체의 임·직원으로써 해당분야의 건설공사·건설기술용역사업을 감독한 경우에는 이를 해당분야와 직무분야의 경력 및 실적으로 인정한다.

사. 규칙 제34조의2제1항 각호의 규정에 의한 □감리경력□으로 인정되는 경력은 다음과 같다.

1) 건설기술관리법 제27조 및 제27조의2의 규정에 의한 책임감리, 시공감리, 검측감리

2) 주택건설촉진법 제36조의6의 규정에 의한 주택건설공사의 감리

3) 건축법 제21조의 규정에 의한 건축물의 공사감리

4) 건설기술관리법 제2조제5호의 규정에 의한 발주청의 공사감독, 공사관리

2. 유사용역 수행실적이라 함은 공고일 기준 최근 3년간 당해 감리용역의 건설공사와 같은 공종의 건설공사에 대한 용역사업을 말한다.

가. 유사용역 수행실적은 공고일 기준 최근 3년간 (2000.08. ∼2003.08. ) 정부, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 준공한 실적(금액)만을 평가한다.

□ 해당분야용역 수행실적

차집관로를 포함한 하수처리장 책임감리 수행실적 100%

하수처리장 책임감리 수행실적 50%

□ 감리협회발행 감리용역수행현황확인서에 등재된 사업에한하여 실적으로인정

3. 전차용역이라 함은 【정선읍 하수처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역】말하며, 이를 수행한 감리전문회사 및 참여감리원에 대하여 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 감리전문회사는 전차용역의 수행정도에 따라 단독수행한 경우 100%, 공동도급 또는 하도급인 경우 용역참여지분율을 적용하여 평가한다.

나. 기본 및 실시설계 100%, 설계감리 20%(기본설계감리 10%, 실시설계감리 10%), 계속공사인 직전공사의 감리용역 100% 인정

다. 기본설계는 시행하지 않고 실시설계를 시행한 경우 실시설계만을 인정한다.

4. 재정상태 건실도의 평가는 연말 또는 반기 결산서에 의한다. 다만, 신규, 합병·분할·사업양수도를 한 사업자는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 신규사업자 : 최초 결산서

나. 합병·분할·사업양수도를 한 사업자

1) 합병·분할에 따른 등기일 또는 사업양수도에 따른 신고수리일 기준으로 작성된 결산서

2) 등기일 또는 신고수리일로부터 1월이 경과한 날이 속하는 월말을 기준으로 작성된 결산서

다. 재정상태는 해당 감리전문회사의 결산서에 따라 공인회계사 또는 세무사가 관계법령에 의거 작성·확인한 □재정상태 검토보고서□ 제출

5. 기술개발,투자실적 및 정보화실적은 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 개발실적 평가

1) 법 제18조의 규정에 의하여 지정된 건설신기술, 건설기술에 관한 특허등록결정 또는 실용신안(등록유지결정을 받은 경우에만 인정)을 받은 후 유효기간 내에 있는 경우 인정한다. □ 하수도분야에 한하여 평가

2) 위 1)의 기술개발실적이 동일 내용으로 건설신기술, 특허 또는 실용신안을 각각 받은 경우 가장 점수가 높은 1건만 인정

3) 위 1)의 기술개발실적은 2인 이상이 공동 등록된 경우 해당점수를 등록권자의 수로 나누어 인정

4) 타인이 보유한 신기술, 특허, 실용신안에 대한 등록권리의 양도, 대여, 사용권협약, 통상 실시권의 경우 불인정(회사 자체 개발실적에 한하여 인정)

5) 건설신기술, 특허, 실용신안은 감리전문회사(대표자 포함) 명의로 지정 또는 등록된 경우에 대하여 인정(감리전문회사에 소속된 직원이 개발·보유하고 있는 기술개발은 제외)하며, 공동도급에 의한 경우에는 참여업체의 개발실적을 합산하여 평가한다.

나. 투자실적 평가

1) 건설기술개발 투자실적(재무재표상의 연구개발비, 교육훈련비 등)은 최근 3년간 업체 총매출액에 대한 비율로 평가한다.

2) 해당 감리전문회사인 경우 공인회계사 또는 세무사가 증명한 최근 3개년 투자실적 제출

다. 정보화실적 평가

1) 정보화실적이라 함은 감리전문회사가 조세특례제한법시행령 별표 5의 규정에 의한 제2호다목 및 제10호①□②의 규정에 준하여 투자한 비용을 말하며, 최근 1년간 정보화투자실적의 기술개발투자실적에 대한 비율로 평가한다.

2) 해당 감리전문회사인 경우 공인회계사 또는 세무사가 증명한 최근 1개년 투자실적 제출

6. 교체빈도의 평가는 다음 각목과 같이 적용한다.

가. 감리전문회사에 대해서는 최근 1년간 감리원으로 배치된 소속 감리원의 교체건수를 합산하여 감리원으로 배치된 전체 소속 감리원수의 합계로 나누어 계산된 값으로 평가한다.

나. 참여감리원은 최근 1년간 참여한 감리용역사업의 계획공정 만료시점 이전에 교체된 경우 교체건수로 보며, 입대·3월 이상의 요양을 요하는 부상 및 입원·퇴직(감리전문회사가 폐업 신고된 경우에 한한다)·이민 또는 발주청의 사정으로 인하여 3월 이상 공사가 지연되어 발주청이 부득이 하다고 인정하는 경우에 대하여는 교체로 보지 아니할 수 있다.

7. 작업계획 및 기법

가. 감리업무 수행지침서, 과업지시서 및 설계도서를 토대로 구체적이고 실제적인 수행방법을 평가항목 순서에 의거 작성하여야 하며 평가항목 이외의 항목이 필요한 경우 추가하여 기술 가능.

나. 표지 및 목차를 제외하고 20쪽 이내로 작성하여야 하며, 필요시 A3용지를 사용할 수 있으나 이 경우 2쪽으로 계상함 (쪽수 위배시 당해분야 평가점수에서 1쪽당 0.3점씩 감점)

8. 공동도급으로 감리용역을 수행할 경우에는 달리 정하는 경우를 제외하고 용역참여지분율을 곱하여 산정한 후 이를 합산한다.

Ⅲ. 감리원의 자격기준(건설기술관리법 시행령 51조2 별표3)

등 급	기 술 자 격 자	학 력 □ 경 력 자
수석감리사	·기술사 또는 건축사의 자격을 취득한 자로서 10년이상 건설공사 업무를 수행한 자 ·기사의 자격을 취득한 자로서 19년이상 건설공사 업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 22년이상 건설공사 업무를 수행한 자	·박사학위를 취득한 자로서 14년이상 건설공사 업무를 수행한 자 ·석사학위를 취득한 자로서 19년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 22년이상 건설공사업무를 수행한자 ·전문대학을 졸업한 자로서 25년이상 건설공사업무를 수행한자 ·고등학교를 졸업한 자로서 28년이상 건설공사업무를 수행한자
감 리 사	·기술사 또는 건축사 ·기사의 자격을 취득한 자로서 9년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 12년이상 건설공사업무를 수행한 자	·박사학위를 취득한 자로서 4년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·석사학위를 취득한 자로서 9년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 12년이상 건설공사업무를 수행한자 ·전문대학을 졸업한 자로서 15년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 18년이상 건설공사업무를 수행한 자
감리사보	·기사의 자격을 취득한 자 ·산업기사의 자격을 취득한 자로서 2년이상 건설공사업무를 수행한 자	·석사 또는 박사학위를 취득한 자 ·학사학위를 취득한 자로서 2년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·전문대학을 졸업한 자로서 5년이상 건설공사업무를 수행한 자 ·고등학교를 졸업한 자로서 8년이상 건설공사업무를 수행한 자

Ⅳ. 평가항목 및 배점기준 : 제13조제1항제1호에 의한 평가대상용역

평 가 항 목	배점범위	기 준 및 배 점			평가방법	비 고
가. 참 여 감 리 원 (책임감리원+기타감리원)	50점	등 급		3점	절대평가
		해당분야경력		31점	□
		직무분야실적		16점	□
나. 유사용역 수행실적	10점	감리전문회사의 유사용역 수행실적		10점	□
다. 전차용역과의 관련	5점	감리전문회사		3점	□
		참여감리원		2점	□
라. 신 용 도	10점	입찰참가 제한 및 업무정지		7점	□
		재정상태 건실도		3점	□
			자본비율	1.5점	□
			유동비율	1.5점	□
마. 기 술 개 발 및 투 자 실 적	5점	기술개발실적		2점	□
		투자실적		2점	□
		정보화실적		1점
바. 업 무 중 첩 도	10점	상주감리원		6점	□
		비상주감리원		4점	□
사. 교 체 빈 도	5점	감리전문회사		2.5점	□
		참여감리원		2.5점	□
아. 작업계획 및 기법	5점	과업수행계획		3점	□
		작업기법		2점	□
자. 가점 및 감점	□4점	□참여감리원의 상훈, 교육훈련, 업체 및 참여감리원 부실벌점, 년령감점 □가점 및 감점은 □4점 범위내에서 적용함

Ⅳ. 평가항목별 세부평가기준

1. 참여감리원 : 50점

가. 책임감리원 : 25점

1) 등급 : 건설관리법시행규칙 제34조의2 제1항에서 정한 총공사비 100억원 이상인 건설공사에 대한 감리경력 1년 이상인 감리사(책임감리원의 경력 및 배치기준에 부적합할 경우에는 평가대상에서 실격처리)

2) 해당분야 경력 : 15점

① 자격취득 시기, 자격보유 여부에 관계없이 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 하수도분야설계·시공·감독□감리경력

② 중복 참여기간은 평가대상에서 제외

당해공사규모	설계·시공·감독□감리경력 (단위:월)
300억원 미만 100억원 이상	36이상	36미만 28이상	28미만 28이상	20미만 12이상	12미만
점 수	15	13.5	12	10.5	9

3) 직무분야 실적 : 10점

① 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 사업에 한하여 인정

② 건설기술관리법시행령 제4조 별표1 제3호(건설기술관련 기술분야 및 등급중 직무분야)에 해당하는 수행실적

□토목분야 설계, 시공, 건설사업관리, 정밀안전진단. 감독, 감리 참여실적 : 7점

구 분	16년 이상	16년 미만 13년 이상	13년 미만 10년 이상	10년 미만 7년 이상	7년 미만
점 수	7	6.3	5.6	4.9	4.2

□토목분야 시공, 건설사업관리, 정밀안전진단. 감독, 감리 참여실적 : 3점

구 분	7년 이상	7년 미만 5년 이상	5년 미만 3년 이상	3년 미만 2년 이상	2년 미만
점 수	3	2.7	2.4	2.1	1.8

나. 보조감리원(3명) : 15점

1) 등   급 : 감리사 1인, 감리사보2인

2) 해당분야 경력 : 9점

① 자격취득 시기, 자격보유 여부에 관계없이 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 하수도분야설계·시공·감독□감리경력

② 중복 참여기간은 평가대상에서 제외

□채점방식 : (□개인별 경력점수) / 평가인원수

당해공사규모	설계·시공·감독□감리경력 (단위:월)
100억원 이상	24이상	24미만 18이상	18미만 12이상	12미만 06이상	6미만
점 수	9	8.1	7.2	6.3	5.4

3) 직무분야 실적 : 6점

① 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 사업에 한하여 인정

② 건설기술관리법시행령 제4조 별표1 제3호(건설기술관련 기술분야 및 등급중 직무분야)에 의한 해당전문 직무분야의 수행실적

□채점방식 : (□개인별 실적점수) / 평가인원수

□전문분야의 설계, 시공, 건설사업관리, 정밀안전진단, 감독, 감리 참여실적 : 4점

구 분	경력(단위:년) 및 점수
감 리 사	10이상	10미만 8이상	8미만 6이상	6미만 4이상	4미만
감리사보	8이상	8미만 6이상	6미만 4이상	4미만 2이상	2미만
점 수	4	3.6	3.2	2.8	2.4

□전문분야의 시공, 건설사업관리, 정밀안전진단. 감독, 감리 참여실적 : 2점

구 분	경력(단위:년) 및 점수
감 리 사	4이상	4미만 3이상	3미만 2이상	2미만
점 수	2	1.8	1.6	1.4
감리사보	3이상		3미만
점 수	2		1.6

다. 비상주감리원 : 10점

1) 등 급 : 3점

당해공사규모	등급 및 점수
100억원이상	감리사이상	감리사보
점 수	3	2

2) 해당분야 경력 : 7점

① 자격취득 시기, 자격보유 여부에 관계없이 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 하수도분야 설계·시공·감독□감리경력 합산기간으로 평가

② 중복 참여기간은 평가대상에서 제외

당해공사규모	설계, 시공, 감독, 감리 경력(단위 : 월)
300억원 미만 100억원 이상	36이상	36미만 28이상	28미만 20이상	20미만 12이상	12미만
점 수	7	6.3	5.6	4.9	4.2

□ 참여감리원의 경력평가시 발주청 및 업무분야가 명기되지 않은 경력은 평가에서 제외합니다

2. 유사용역 수행실적 : 10점

가. 유사용역 수행실적은 공고일 기준 최근 3년간내 (2000.08. . ∼2003.08. ) 정부, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행한 준공한 실적(금액)만을 평가한다

- 차집관로를 포함한 하수처리장실적 100%.  - 하수처리장실적 50%.

□ 공고일기준하여 3년내에 수행한 준공실적을 평가함.

□ 감리협회발행 감리용역수행현황확인서에 등재된 사업에 한하여 실적인정함.

나. 감리전문회사 실적  : 10점

당해공사규모	감리용역 수행실적(단위 : 억원)
300억원 미만 100억원 이상	80이상	80미만 60이상	60미만 40이상	40미만 20이상	20미만
점 수	10	9	8	7	6

3. 전차용역과의 관련  : 5점

가. 감리전문회사 : 3점

1)  정선읍 하수처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 100% 적용

2)  단독수행 100%, 공동도급□하도급시는 용역참여지분율 적용

구 분	용역완료후 3년미만	용역완료후 3년이상 5년미만	용역완료후 5년이상 10년미만	용역완료후 10년이상
점 수	3	2.4	0.9	0

나. 참여감리원 : 2점

1) 정선읍 하수처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 100% 적용

2) 단독수행 100%, 공동도급□하도급시는 용역참여지분율 적용

3) 사업책임기술자가 책임감리원으로 참여하는 경우 : 100%

(분야별책임기술자가 참여하는 경우 : 50%)

4) 사업책임기술자가 보조감리원(비상주감리원 포함)으로 참여하는 경우 : 50%

(분야별책임기술자가 참여하는 경우 : 25%)

구 분	용역완료후 3년미만	용역완료후 3년이상 5년미만	용역완료후 5년이상 10년미만	용역완료후 10년이상
점 수	2	1.6	0.6	0

4. 신용도 : 10점

가. 입찰참가제한, 업무정지 : 7점

1) 감리전문회사가 최근 1년간 관계법령에 따라 입찰참가제한 또는 업무정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.7점씩 감점 (1월미만인 경우 1월로 계산)

2) 참여감리원이 최근 1년간 관계법령에 따라 기술자격정지 또는 업무정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 3월마다 0.7점씩 감점 (3월미만인 경우 3월로 계산)

나. 재정상태 건실도 : 3점

1) 자본비율 : 1.5점

자본비율은 최근년도 한국은행 발행 □기업경영분석□자료에서 전체 건축기술 및 엔지니어링서비스업에 대한 평균자기자본비율(자기자본/총자산)을 기준 : 2002년 기준 적용

□ 감리전문회사 자기자본비율/평균자기자본비율

구 분	100%이상	100미만 75이상	75미만 50이상	50미만 25이상	25%미만
점 수	1.5	1.25	1.0	0.75	0.5

나) 유동비율 : 1.5점

유동비율은 최근년도 한국은행 발행 □기업경영분석□자료에서 건축기술 및 엔지니어링서비스업에 대한 평균유동비율(유동자산/유동부채)을 기준 : 2002년 기준 적용

□ 감리전문회사 유동비율/평균유동비율

구 분	100%이상	100미만 75이상	75미만 50이상	50미만 25이상	25%미만
점 수	1.5	1.25	1.0	0.75	0.5

5. 기술개발, 투자실적 및 정보화 실적 : 5점

가. 개발실적 : 2점

1) 건기법에 제18조의 규정에 의하여 지정된 건설신기술, 건설기술에 관한 특허등록결정 또는 실용신안(등록유지결정을 받은 경우에만 인정)을 받은후 유효기간 내에 있는 경우, 감리전문회사(대표자포함) 명의로 지정 및 등록된 경우에 대하여 인정

□ 하수도분야에 한하여 인정

① 건설신기술, 건설기술에 관한 특허 : 건당 1점

② 건설기술에 관한 실용신안         : 건당 0.5점

□특허, 실용신안은 경과기간에 따라 가중치 부여

구 분	5년이하	6년이상 11년미만	11년이상 20년이하
특 허	100%	80%	60%
실 용 신 안	100%	80%	-

□ 위의 기술개발 실적이 동일내용으로 건설신기술, 특허 또는 실용신안을 각각 받은 경우 가장 점수가 높은 1건만 인정

□ 위의 기술개발실적을 2인 이상이 공동 등록된 경우 해당점수를 등록권자의 수로 나누어 인정

나. 투자실적 : 2점

1) 최근3년간 기술투자실적의 업체 총매출액에 대한 비율

(건설기술개발투자액 / 업체 총매출액)에 따라 산정

구 분	3.0%이상	3.0미만 2.5이상	2.5미만 2.0이상	2.0미만 1.5이상	1.5%미만
점 수	2	1.8	1.6	1.4	1.2

다. 정보화 실적 : 1점

1) 최근1년간 정보화투자실적의 기술개발투자실적에 대한 비율

구 분	10%이상	10미만 7이상	7미만 4이상	4미만 1이상
점 수	1	0.7	0.4	0.1

6. 업무중첩도 : 10점

가. 상주감리원 : 6점

1) 다른 공사현장(비상주감리원 포함)에 중복배치시 : 0점

2) 공고일 기준으로 당해 용역 착수 예정일(2개월 이내)까지는 중복배치에서 제외

3) 평가대상 상주 책임 및 보조감리원 (기계1인)만 평가

구 분	책임감리원	보조감리원
점 수	4	2

나. 비상주감리원 : 4점

1) 다른 공사현장의 상주감리원으로 중복 배치시 : 0점

2) 다른 공사현장의 비상주감리원으로 6개이상 중복 배치시 : 0점

건 수	없음	2개미만 1개이상	4개미만 2개이상	6개미만 4개이상	6개이상
점 수	4	3	2	1	0

7. 교체빈도 : 5점

가. 감리전문회사 : 2.5점

1) 감리전문회사 소속 전체 감리원중 현장배치된 감리원수에 대한 최근 1년간 감리원으로 참여한 감리용역에서 교체건수 합계의 비율

(비상주감리원의 경우 교체 5건마다 1건으로 계산)

교체빈도율(%)	10%미만	10%이상 20%미만	20%이상
점 수	2.5	2	0

나. 참여감리원 : 2.5점

1) 참여감리원중 최근 1년간 상주감리원으로 현장배치된 감리용역에서의 교체 1회당 0.5점씩 감점 (비상주감리원의 경우 1회당 0.1점씩 감점)

8. 작업계획 및 기법  : 5점

가. 과업수행계획 : 3점

1) 공사시행단계별 품질·안전·공사·공정관리 및 감리원 배치계획등에 대한 과업수행계획서 제출

□우수 : 3점,  보통 : 1.8점,  미흡 : 0.6점,  미제출 : 0점

나. 작업기법 : 2점

1) 당해 감리용역수행시 예상되는 문제점, 대책 및 착안사항등에 대한 계획서 제출

□우수 : 2점,  보통 : 1.2점,  미흡 : 0.4점,  미제출 : 0점

9. 가점 및 감점

가. 가 점

1) 상 훈

① 참여감리원의 최근 1년간 하수종말처리장 감리업무와 관련하여 발주청의 장 이상의 표창(감사장, 공로장 제외)을 받은 경우 가점 하되 참여감리원 전체에 대해 1.5점 범위 내에서 가점. 이 경우 1인이 2이상의 표창을 받은 경우 가장 높은 표창에 대해서만 가점함.

(표창장 또는 공적조서 등에 직접 감리업무와 관련이 있는 경우에 인정)

□ 발주청의 장            : 0.5점

□ 국무총리·장관·감사원장 : 1.0점

□ 대통령· 포장·훈장      : 1.5점

□점수계산방법 : 평가대상 감리원 해당점수 합계□평가대상 감리원수(4명)

2) 교육훈련

① 참여감리원이 최근 3년간 건기법(제6조 제2항)의 규정에 의한 교육훈련을 1주이상 참여감리원마다 다음 기준에 따라 가점(단,2점의 범위내에서 가점)

□ 2주이상 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원 / 평가대상인원) □ 0.5점

□ 1주이상 2주미만 교육을 이수한 경우 : (교육이수인원 / 평가대상인원) □ 0.3점

나. 감 점

1)  년령감점

① 책임감리원 □ 61세이상 1점

② 보조감리원 □ 55세이상 1인당 1점

1) 부실벌점

① 참여감리전문회사 및 참여감리원이 감리업무와 관련하여 건기법 규정(규칙 제13조의6)에 의하여 부실벌점을 받은 경우 동 규정에서 정하는 기준에 따라 감점

□ 참여감리업체 부실벌점(-3점) □  2점이상 10점미만 : -1점

10점이상 15점미만 : -2점

15점이상          : -3점

□ 참여감리원 부실벌점(-3점)   □  2점이상 10점미만 : -1점

10점이상 15점미만 : -2점

15점이상          : -3점

과  업  지  시  서

2003 .  8 .

과  업  지  시  서

1. 사업명 : 정선읍 하수처리시설 건설사업 전면책임감리용역

2. 사업의 개요

2.1 사업의 목적

□ 본 과업은 정선군 정선읍 하수처리구역내에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리함으로써 지속적으로 증가하는 생활하수량에 대비하고 방류하천의 수질보호와 주민의 보건위생향상 및 쾌적한 도시생활 환경조성에 이바지 하고자 정선읍 하수처리시설 건설공사를 시행함에 있어 관계규정에 따라 정밀한 시공, 철저한 품질관리 및 안전관리와 효율적인 공정관리를 통하여 예산의 적정 집행과 완벽한 시설물을 축조하며 예정된 사업기간내에 공사를 완료할 수 있도록 전면책임감리용역을 실시코자 함.

2.2 감리대상 사업의 개요

하수처리시설 : Q = 3,000□

차집관거 : D =200□∼500mm , L = 6.7□

3. 감리용역기간 및 설계변경조건

3.1 착공일로 부터 24개월

공사기한은 시설공사 준공시까지를 원칙으로 하고 시설공사의 공사기간 변동시 책임감리용역 기간도 조정 변경하여 시행한다.

3.2 설계변경조건

본 용역의 대가는 □건설공사 감리대가 기준□에 따라 정액적산 방식을 적용하여 산출하였으며 다음의 경우 그 대가를 조정한다.

가. 용역 계약 체결후 60일이상 경과하고 노임 및 물가변동으로 인하여 계약금액의 합계액이 5/100이상 증감되었을 경우

나. 당해공사의 설계변경으로 공사계약금액(자재대를 포함한다)이 당초금액보다 10%이상 증감된 경우

다만, 물가변동으로 인한 공사계약금액이 조정된 경우는 제외한다.

다. 건설기술관리법에 의한 감리대가 기준이 변경되었을 때

라. 용역기간의 조정, 감리원 투입계획의 조정 등 정당한 설계변경 사유가 발생하였을 때

4. 감리원의 근무원칙

4.1 감리원의 지위

감리업무를 수행함에 있어 감리원은 발주청과의 계약에 의하여 발주기관의 장의 감독업무를 수행하며, 발주청은 관계법령에서 별도로 정하는 사항 및 계약내용에 정하는 사항이외에는 정당한 사유없이 감리원의 업무에 개입 또는 간섭하거나 감리원의 권한을 침해할 수 없다.

4.2 감리원의 업무자세

감리업무에 종사하는 자는 그 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

가. 감리원은 관계법령과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무를 수행하며, 품위를 손상하는 행위 금지

나. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안됨.

다. 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력

라. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해공사의 공사계약문서, 감리 과업지시서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해공사의 특수성을 파악한 후 감리 수행

마. 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니됨

바. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주청에 보고하고 지시를  받아 업무를 수행한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한후 즉시 발주청에  보고하여야 한다.

사. 감리전문회사 대표자 및 감리원은 당해 공사시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 발주청의 출석요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

4.3 상주감리원의 현장근무 방법

가. 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며, 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 업무일지 등에 기록하여 발주청의 승인(긴급시 유선 승인)을 받아야 한다.

나. 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무 수행기간중 법에 의한 교육이나 민방위기본법 또는 향토예비군 설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급 휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정(동일현장의 상주감리원 또는 비상주감리원) 및 업무 인계□인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 상주감리원은 발주청의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 시공자가 발주청의 승인을 득하여 초과근무를 하는 경우에는 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 국가를당사자로하는계약에관한법률에 의한 회계예규(기술용역계약일반조건)에서 정하는 바에 따른다.

4.4 비상주 감리원의 업무범위

가. 감리전문회사의 본사 등에 근무하면서 항상 상주감리원의 업무를 지원하는 비상주감리원의 업무범위는 다음과 같다.

1) 건설기술관리법 시행규칙 제34조 제1항 제2호에서 정한 업무

2) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사(계약금액 감액의 경우를 포함)

3) 정기적(분기 또는 반기별)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도

4) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원 업무

나. 비상주감리원은 가호 1), 4)의 업무를 정확하고 신속하게 지원하여야 한다.

5. 공사시행 단계별 업무분담

발주기관, 감리원, 시공자간의 공사시행 단계별 업무분담은 다음과 같다

.

단 계	업 무 종 류	세 부 사 항	업 무 담 당
			발주청	지원업무 수 행 자	감리원	시공사
공사착공	·감리계약 체결 ·용지측량, 기공승락, 지장물 이설확인 용지보상 등의 지원업무를 수행 ·감리업무 착수 ·업무연락처 등의 보고 ·설계도서 등의 검토 ·감리사무실 설치 및 설계도서 등의 관리 ·착공신고서 ·공사표지판 등의 설치 ·측량기준점 및 각종 규준시설 ·확인측량 ·유관자 합동회의 ·하도급 관련사항 ·현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정 ·현지여건 조사 ·인.허가 업무 ·공사착수 회의 ·품질보증계획(품질시험계획)	·P.Q기준 ·감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서 ·발주청에 보고 ·감리원에게 보고 ·사무실의 설치 ·설계도서 등의 관리 ·측량기준점의 보호 ·규준시설 설치 ·확인측량 실시 ·확인측량 결과의 처리 ·가시설물 설치계획표	시 행 지 시 요 구 승 인 주 관 주 관 승 인	작 성 검 토 협 의	주 관 시 행 시 행 검토,보고 시 행 검토,보고 승 인 이동시승인 확 인 입회,확인 검토,보고 주 관 검 토 승 인 합동조사 요 구 주 관 검 토	검토,보고 시 행 작 성 시 행 시 행 시 행 시 행 작 성 내용설명 요 구 작 성 합동조사 요 구 주 관 주 관
공사시공	·일반 행정업무	·감리원에 대한 지도 관리 ·감리기록관리 ·발주청에 정기 및 수시 보고 사항 ·현장 정기교육 ·발주청의 자문 요구 및 감리원의 의견 제시 ·민원사항 ·발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악 보고 ·필요시 기성검사 입회 ·현장대리인, 시공자 기술자 등의 교체 ·추가용지보상 업무 ·제 3자 손해의 보상 ·시공자에 대한 지시 ·수명사항의 처리 ·공사진행과정 사진촬영 및 설명서 작성	승 인 접 수 요 구 요 구 필요시 입회지시 요 구 주 관 지 시	주 관 조 치 주 관 입 회 조 사	확 인 보 고 지 시 작 성 검토,보고 작 성 검토,보고 협 조 검 토 주 관 보 고 보 관	작 성 주 관 조 치 시 행 협 조 주 관 결과보고 이 행 주 관

단 계	업 무 종 류	세 부 사 항	업 무 담 당
			발주청	지원업무 수 행 자	감리원	시공사
공사시공	·품질관리	·품질보증계획 ·품질시험계획 ·품질시험의 요령 및 조치 ·시험.검사성과 처리 ·외부기관에 품질시험 의뢰	주 관 이행확인 승 인 주 관		이행확인 이행확인 입회확인 검토,확인 지 시 입회확인	작 성 시 행 보 고 주 관
	·시공관리	·시공계획서 ·시공상세도 ·명일작업실적 및 명일 작업계획서 ·시공확인 ·검측업무 ·매몰부분 검사 기록 ·현장실정 보고 ·암반선 ·특수공법 ·기술검토 의견서 ·주요기자재 공급원의 검토 승인 신청서 ·주요기자재의 검수, 관리 ·지급자재의 검수, 관리 ·지장물 및 기존구조물의 철거 ·발주청에 현장상황 보고 ·감리원의 공사중지 명령 등	요 구 요 구 승 인 협 의 승 인 검토,지시		검토,확인 검토,확인 검토,확인 확인,지시 확인,승인 작 성 작성,확인 검토보고 확 인 검 토 작 성 승 인 확 인 확인,보고 검토,확인 보 고 지시,요구	작 성 작 성 작성,협의 시 행 요 청 작 성 요 구 요 구 작 성 주 관 요 구 작 성 시 행
	·설계변경 및 계약금액의 조정	·경미한 설계변경 ·발주기관의 장의 지시에 의한 설계변경 ·시공자의 제안에 의한 설계변경 ·변경계약전 설계변경에 따라 기성고 및 지급자재의 지급 ·계약금액의 조정	지 시 통 보 승 인 승 인	검 토	검토,지시,보고 검토, 보고 검토,지시,보고 확 인 심사,보고	작 성 검토,작성,보고 작 성 요 구 작 성
	·공정관리	·공정관리계획서(실시공정표 작성) ·공사진도관리(월간-주간 상세공정표) ·부진공정 만회대책 ·수정공정계획 ·준공기한 연기원 ·공정현황 보고	승 인		승인,보고 검토,확인,지시 지시,검토,보고 검토,승인,보고 검 토 검토,확인,보고	작 성 작 성 작 성 요구,작성 작 성 보 고

단 계	업 무 종 류	세 부 사 항	업 무 담 당
			발주청	지원업무 수 행 자	감리원	시공사
공사시공	·안전관리 ·환경관리	·안전관리 ·안전점검 ·안전교육 ·안전관리 결과 보고서 ·사고처리 ·환경관리 ·제보고 사항	주 관		확인,지도 지도,감독 지시,감독 검토,지시 지시,보고 지도,감독 보 고	시 행 시 행 시 행 작 성 조 치 시행,보고 작 성
기성부분 및 준공검사	·검사지침	·검사자의 임명 ·검 사 ·불합격 공사에 대한 재시공 명령 ·기성부분검사원 및 기성내역서 검토 ·감리조서의 작성 ·기성부분 검사 ·시설물 시운전 ·예비준공검사 ·준공검사원 ·준공도면 등의 검토 ·공사현장의 사후관리 ·준공표지의 설치	입회,확인	입 회 입 회	보 고 검사,보고 지시,재검사 검 토 작 성 검사,보고 검토,보고 검사,지시,보고 검사,검토 확인,보고 검토,확인,보고 확인,검사 지시,확인	조서작성 시 행 작 성 입 회 작 성 보 완 작 성 작 성 시 행 시 행
인수□인계	·시설물 인수.인계 ·준공후 현장문서 인수. 인계 ·유지관리 및 하자보수	·시설물 인수.인계 계획 수립 ·시설물 인수.인계 ·준공도서 등의 인수 ·시설물의 유지관리지침서 등 ·하자보수에 대한 의견 제시	시 행 협의,인수 조사지시		검토,통보 입회,검토 협의,작성 검토,보고 의견제시	작 성 시 행 자료제출

6. 감리업무 착수

6.1 감리전문회사는 계약즉시 상주 및 비상주 감리원 투입등 감리업무 수행준비에 대하여 발주청과 협의하여야 하며, 계약상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 단, 감리대상 건설공사의 전부 또는 일부의 용지매수 지연등으로 계약상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주청은 실 착수 시점 및 상주 감리원 투입시기등을 조정, 통보하여야 한다.

6.2 감리전문회사는 감리용역 착수시 다음 각호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

가. 감리업무수행계획서

나. 감리비 산출내역서

다. 상주,비상주감리원 지정신고서와 감리원 경력확인서

라. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

6.3 감리전문회사 선정을 입찰자격심사제도로 적용한 경우에 있어“6.2”항 다호의 감리원은 입찰참가제안서에 명시된 자로 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 교체가 필요한 경우에는 기술자격, 학□경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무 수행 능력이 저하되지 않는 범위내에서 발주청의 사전 승인을 받아야 한다.

6.4 발주청은“6.2”항 제 다, 라호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성내용이 당해 공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 않다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 변경을 요구할 수 있으며, 변경 요구를 받은 감리전문회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

6.5 감리원은 공사시공 관련 각종 인□허가 사항을 포함한 제반법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도□감독하여야 하며, 발주청이 득하여야 하는 인□허가 사항은 발주청에 협조□요청하여야 한다.

6.6 승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는한 감리용역 완료시까지 근무토록 하여야하며 교체가 필요한 경우에는 제반 법규에 따라 교체 인정 사유를 명시하여 발주청의 사전 승인을 받아야 한다.

6.7 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련분야 기술 자격자 또는 학력,경력을 갖춘자로 구성되어야 한다.

6.8 감리단의 조직은 공사담당과 품질담당으로 현장여건에 따라 구성토록 하므로써 감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

6.9 책임감리원은 보조감리원의 개인별 업무를 분담하고 그 분담내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록한다.

7. 설계서 등의 검토

7.1 감리원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서, 공사계약서 등의 계약내용과 당해공사의 조사설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여야 함은 물론 창의력을 발휘하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 노력하여야 한다.

7.2 감리원은 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합 여부등 현장시공을 주안으로 하여 해당공사 시행전에 검토하여야 하며, 특히 비상주 감리원은 기술적인 검토가 필요한 사항과 상주감리원이 요청한 사항에 대하여 세밀하게 검토하여야 한다.

7.3 감리원은 7.2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을시는 그 내용과 의견을 발주청에 보고 하여야 한다. 또한 시공자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

8. 설계서 등의 관리

8.1 감리원은 착공과 동시에 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주청으로 부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부유출시 발주청(지원업무 수행자)의 승인을 받아야 한다.

8.2 설계서는 반드시 도면보관함에 보관하여야 하고, 케비넷 등에 보관된 설계서 및 관리서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 하며, 시공자가 차용하여 간 설계서도 필히 상기요령에 의거 보관토록 하여야 한다.

8.5 감리원은 공사 준공과 동시한 인수한 설계서 등을 발주청에 반납하거나 지시에 따라 폐기처분 한다.

8.6 감리원은 공사의 여건을 감안하여 각종 법규정, 표준시방서, KS규정집 및 필요한 기술서적 등을 비치하여야 한다.

9. 착공신고서 검토 및 보고

감리원은 건설공사가 착공된 경우에는 즉시 시공자로 부터 착공신고서를 제출받아 적적성 여부를 검토하여 7일이내에 발주청에 보고하여야 한다.

10. 확인측량 및 현지조사

10.1 감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 발주설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하는 확인 측량을 조속히 실시토록 하여야 한다.

10.2 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인측량시 입회, 확인하여야 하며, 필요시 실시설계 용역회사 대표자의 위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상 유무를 확인토록 하여야 한다.

10.3 확인측량결과 설계내용과 측량결과가 현저히 상이할 때는 발주청에 측량결과를 보고한 후 지시를 받아 실제 시공에 착수하게 하여야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 원지반을 원상태로 보존하게 하여야 한다.

10.4 감리원은 확인측량을 공동 확인후에는 시공자에게 서류를 작성 제출토록 하고, 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 실시설계 용역회사의 책임자(입회한 경우), 책임감리원이 서명날인하고 검토 의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

10.5 건축공사 현장의 감리원은 필요한 경우 지적법에 따라 확인 측량된 대지 경계선내의 공사용 부지에 시공자로 하여금 전체동의 건축물을 배치하도록 하여 도로에 의한 사선제한, 대지 경계선에 의한 높이제한, 인동간격에 의한 높이제한등 건축물 배치와 관련된 규정에 적합한지 여부를 확인하고, 건축물 배치도면을 작성하게하여 10.4항에서 정한 서류와 함께 발주청에 보고하여야 한다.

10.6 감리원은 공사 착공후 조속한 시일내에 공사 추진에 지장이 없도록 시공자와 합동으로 다음 각호의 사항을 현지 조사하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

가. 각종 재료원 확인

나. 지반 및 지질상태

다. 진입도로 현황

라. 인접도로의 교통규제 상황

마. 지하매설물 및 장애물

바. 기후 및 기상상태

사. 하천의 최대홍수위 및 유수상태 등

10.7 감리원은 10.6항의 현지조사 내용과 설계도서의 공법 등을 검토하여 인근 주민등에 대한 피해발생 가능성이 있을 경우에는 시공자에게 대책을 강구하도록 하고, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

11. 인.허가 업무

감리원은 공사시공과 관련된 각종 인.허가 사항을 포함한 제법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도.감독하여야 하며, 발주청의 이름으로 득하여야 하는 인.허가 사항은 발주청에 협조 요청토록 한다.

12. 공사관련자 회의

감리원은 발주청(지원업무 수행자)이 주관하는 관련자 합동회의에 참석하여 현장조사 결과와 설계서 등의 내용을 설명하고 필요한 사항에 대하여는 발주청(지원업무 수행자)의 지시에 따라야 한다.

13. 공사 시행단계의 감리업무

13.1 감리원과 발주청은 과다한 행정업무로 인하여 감리원의 품질관리 업무에 지장을 초래, 부실공사 등의 문제가 야기되지 않도록 행정업무 간소화에 노력하여야 한다. 감리원은 감리업무 착수후 빠른 시일내에 당해공사의 내용, 규모, 감리원 배치인원수 등을 감안하여 다음의 각종 행정업무중에서 최소한의 필요한 행정업무사항을 발주청과 협의 결정하고 이를 시공자에게도 통보하여야 한다.

13.2 감리원은 다음 각호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 또는 분기마다 CD-ROM으로 작성하여 다음달 7일 이내에 발주청에 2부를 제출(시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 정한 1종시설물이 포함되지 않은 공사에 대하여는 1부 제출)하여야 하되, 발주청의 요구가 있을때나 CD-ROM작성 완료시에는 즉시 제출하여야 하며, 구조물 안전에 영향을 미치지 아니하는 L형측구 등 단순 구조물에 대하여는 발주청과 협의하여 제출하지 아니할 수 있다. 발주청은 CD-ROM으로 제출받은 감리보고서중 1종시설물이 포함된 공사에 대하여는 제출 받은지 7일이내에 1부를 감사원에 제출하여야 한다.

가. 감리보고서 표지 등

나. 책임감리원 업무일지

다. 보조/검측 감리원 업무일지

라. 품질시험, 검사현황

마. 구조물별 콘크리트 타설현황, 콘크리트 타설 참여자 실명부를 첨부

바. 검측요청, 결과 통보서

사. 주요자재 검사 및 수불부

아. 공사설계 변경 현황

자. 주요구조물 단계별 시공현황

차. 콘크리트 구조물 균열관리 현황

카. 공사사고 보고서

타. 기타

〈부 칙> 감리업무 보고등에 관한 적용례

① 감리업무수행지침서 제20조제1항의 개정규정은 이 지침 시행후 다음 각호  의 1에 해당하는 경우에 이를 적용한다.

·총공사비 3,000억원 이상인 건설공사의 경우에는 2001년 7월 1일부터 시행

·총공사비 1,000억원 이상인 건설공사의 경우에는 2002년 1월 1일부터 시행

·총공사비 300억원 이상인 건설공사의 경우에는 2002년 7월 1일부터 시행

·총공사비 100억원 이상인 건설공사의 경우에는 2003년 1월 1일부터 시행

② 제1항 각호의1에 의한 감리업무보고가 시행되기 전까지는 감리업무수행지  침서 제20조 제1항에서 정한 별지서식을 서면으로 작성하여 제출할 수 있다.

13.3 감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성□비치하여야 한다.

가. 문서접수 및 발송대장

나. 민원처리부

다. 품질시험계획

라. 품질시험□검사성과 총괄표

마. 시험□검사실적 보고서

바. 검측대장

사. 발생품(잉여자재)정리부

아. 안전보건 관리체제

자. 재해 발생현황

차. 안전교육 실적표

카. 협의내용 등의 관리대장

타. 사후 환경영향조사 결과보고서

파. 공사 기성부분 검사원

하. 감리원(기성부분, 준공) 감리조서

거. 공사 기성부분 내역서

너. 공사 기성부분 검사조서

더. 준공검사원

러. 준공검사조서

13.4 감리원은 당해공사에 관하여 다음 각호의 사항을 포함한 최종감리보고서를 CD-ROM으로 작성하여 감리기간 종료후 14일이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주청에 제출하여야 한다. 이 경우 CD-ROM의 제출방법, 대상시설물 및 수량은 제1항의 규정에 따른다.

가. 사업개요 : 건설공사 및 감리용역 개요(계약현황 포함)

나. 기술검토내용 총괄 실적

다. 공사추진내용 총괄 실적 : 인력, 장비투입 현황 등

라. 검측내용 총괄 : 공종별 불량율, 부실 유형별 원인 및 방지대책

마. 우수시공 및 실패시공 사례

바. 품질시험·검사촐괄, 품질관리비 사용실적

사. 주요자재 관리실적 총괄

아. 안전관리 실적총괄 : 안전관리활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생  건수 및 원인·방지대책

13.5 감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출받아 확인한 후  보관하여야 한다.

13.6 책임감리원은 13.2항 나호의 책임감리원 업무일지를 작성할 때에 본인의 업무내용을 기록함은 물론 보조감리원들의 업무일지를 보고 그 내용을 요약□정리함과 동시에 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 작성하여 모든 감리원에게 공람□서명토록 하여 감리원 모두가 현장내용을 파악할 수 있게 하고 투명한 감리업무가 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

13.7 감리원은 시공자가 제출하는 모든 서류는 반드시 접수하여야 하며, 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 시공자에게 문서로 보완□지시 하여야 한다.

13.8 감리원은 시공자로 하여금 현장종사자(기능공 포함)의 견실시공 의식고취를 위한 현장 정기교육을 월 1회 이상 당해 현장의 특성에 따라 실시하고 그 내용을 기록 비치하여야 한다.

14. 감리원의 의견제시 등

14.1 감리원은 공사중 당해 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한기술적인 사항에 대하여 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 하고 상당한 시간과 비용이 소요되거나 제3자에게 의뢰하여야 하는 전문성이 요구되는 내용에 대하여는 제3자에게 의뢰하여야 한다.

14.2 감리원은 스스로 공사시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 발주청 또는 시공자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

14.3 감리원은 공사시행중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 발주청이 민원처리를 할 수 있도록 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

14.4 감리원은 발주청(지원업무수행자)이 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류 작성의 요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 적극 협조하여야 한다.

14.5 감리원은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고 전화 또는 방문 민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 시공자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구□시행하여야 하고, 그 내용을 민원 처리부(별지 제19호 서식)에 기록□비치하여야 한다. 경미한 민원처리 사항중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

15. 수명사항의 처리

15.1 감리원은 시공자에게 공사와 관련하여 지시하는 경우에는 다음과 같이 처리  하여야 한다.

가. 감리원이 공사와 관련하여 시공자에게 지시할 때에는 서면으로 함을 원칙으로 하며, 현장 여건에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행토록 조치하고 추후에 이를 서면으로 확인하여야 한다.

나. 감리원의 지시내용은 당해공사 설계도면 및 시방서 등 관계규정에 근거, 구체적으로 기술하여 시공자가 명확히 이해 할수 있도록 지시하여야 한다.

다. 감리원은 지시사항에 대하여 그 이행상태를 수시점검하고 시공자로부터 이행 결과를 보고 받아 기록□관리하여야 한다.

15.2 감리원은 발주청으로부터 지시를 받았을때에는 다음과 같이 처리하여야 한다.

가. 감리원은 발주청으로부터 지시를 받은 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검□확인하여 발주청에 서면으로 조치결과를 보고 하여야 한다.

나. 감리원은 당해 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시할수 있다.

다. 감리원은 각종지시,통보사항 등을 감리원 전원이 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여 교육 또는 공람시키도록 하여야 한다.

16. 품질관리

16.1 감리원 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며 시공후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리대상으로 선정하여 타공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 한다.

16.2 감리원은 공종별 중점 품질관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.

16.3 품질관리에 있어 어느 것 하나 중요하지 않은 것은 없다. 그러나, 그 중요성을 너무 강조하다 품질관리가 용이하고 상대적으로 중요성이 낮은 공종은 철저히 관리되고 중요도가 높은 공종은 자칫 지나쳐 버리는 우를 범해서는 안된다.

16.4 감리원은 시공자에게 각 공정마다 준비과정에서 부터 작업완료 까지의 각 과정마다 정밀도 및 품질확보를 위한 수단, 절차 등을 규정한 총제적 품질 관리계획서(TQC :Total Quality Control)를 작성, 제출토록하고 이를 검토,확인하여야 한다.

16.5 감리원은 당해 공사에 사용될 재료가 규격 및 품질기준에 적합한 재료가 선정되고 시공시 품질관리가 효과적으로 수행되어 하자 발생을 사전에 예방할수 있도록 품질관리시험 계획을 지도한다.

16.6 감리원은 당해 공사의 품질관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공종별 시험종목과 시험빈도 및 품질기준을 숙지하고 시험성과표의 검토 및 확인 업무를 수행하여야 한다.

16.7 건설공사의 품질시험□검사를 실시하여야 할 건설공사의 발주청 또는 시공자는 대통령령이 정하는 국□공립시험기관 또는 건설교통부장관에게 등록한 품질시험 전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

17. 시공관리

17.1 감리원은 시공자로부터 시공계획서를 공사착공일로부터 30일 안에 제출받아 이를 검토□확인하여 7일안에 승인한후 시공토록 하여야 한다.

17.2 감리원은 시공계획서를 공사착공계와 별도로 실제 공사 착수전에 제출 받아야 하여 공사중 시공계획서에 중요한 변경내용이 발생한 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 제출받아 검토□확인하여 승인한후 시공토록 하여야 한다.

17.3 감리원은 시공자로부터 각종 구조물의 시공상세도를 사전에 제출 받아 검토□확인하고 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

17.4 시공 상세도는 설계도면 및 시방서 등에 불명확한 부분을 명확히 하여 줌으로서 시공상의 착오방지 및 공사안전을 확보키 위한 수단으로 공사조건에 따라 감리원과 시공자가 필요한 시공상세도를 선정하고, 시공상세도(Shop Drawing) 검토.확인시 까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 한다.

17.5 감리원은 공사가 설계도서 및 시방서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서확인하는 것이 감리원의 업무중에서 가장 중요하고 기본적인 책무인 점을 명심하여 모든 업무에 우선하여 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

17.6 감리원은 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측 요청서를 제출받아 그 시공상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회□확인토록 하여야 한다.

17.7 검측절차

□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□      □□□□□□□□□□□□□□□

□ 현 장 시 공 □    □ 시    공    자 □    □ 검 측 요 청 서 □    □ 감   리   원 □    □검 측 결 과 □ 합격 □ 다 음 단 계 □

□             □ □ □ 담 당 기 술 자 □ □ □                □ □ □              □ □ □            □  □  □             □

□ 완       료 □    □ 점          검 □    □ 제          출 □    □ 현 장  검 측 □    □통       보 □      □ 공 종 착 수 □

□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□      □□□□□□□□□□□□□□□

□                                                              □

□                                                              □

□

□                                                              □

□                                                              □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□                                                     □

□ 재    시    공 □                 불합격시                            □

□                □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 보          안 □       (시공점검표, 시험성과)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

17.8 검사항목

세부공종별로 검사항목을 계약설계도면, 시방서, 건설기술관리법, 감리업무수행지침서 등의 관계규정의 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하여 공사목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여야 한다. 이러한 검사항목은 감리편람 등에 수록한 내용을 공사내용에 따라 취사 선택하여 활용하고, 공사 특수성에 따라 필요시 추가 점검항목을 결정하여야 한다.

17.9 감리원은 설계시 추정된 암반선에 대하여 시공중 실제 암반선이 노출되면 암판정위원회를 구성하여 직접 육안으로 확인하고, 필요시 시험을 실시하여 더욱 정확한 판정을 하여야 한다.

17.10 특수공법의 검토

특수한 공법이 적용되는 경우의 기술검토 및 시공상 문제점 등의 검토를 할 때에는 감리원은 감리전문회사의 본사 비상주감리원 등을 활용하고, 필요시 발주청과 협의하여 외부의 국내□외 전문가의 자문을 받아 검토 의견을 제시할 수 있으며 특수한 공종에 대하여 외부 전문가의 감리참여가 필요 하다고 판단될 경우 발주청과 협의하여 조치할 수 있다.

17.11 기술검토 의견서

감리원은 시공중 발생되는 기술적 문제점, 설계변경사항, 공사계획 및 공법 변경문제, 설계도면과 시방서 상호간의 차이,모순 등의 문제점, 기타 시공자가 시공중 당면하는 문제점 및 발주청이 해당공사의 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사,검토,분석하여 시공자가 공사를 원활히 수행할수 있는 해결방안을 제시하여야 한다. 중요한 기술검토는 반드시 서면으로 기술검토서를 작성□제출하여야 한다. 기술검토서에는 상세 기술검토내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

17.12 주요기자재 공급원 승인

가. 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(K.S 의무화 품목등) 공급원 승인신청서를 사용 30일전까지 제출토록 하여야 한다. 이때 공급원의 사업자등록증 사본, 공인기관 시험성과표 등을 첨부해야 하며, 관련 법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

나. 감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 하고, 수급차질에 의한 공정 지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 감리원은 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재등 주요 기자재가 공급원 승인을 받은후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록□비치하여야 한다.

17.13 지장물 등 철거, 확인

가. 공사중에 지하매설물 등 새로운 지장물 발견시에는 시공자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출받아 이를 확인한후 발주청에 조속 보고하여야 한다.

나. 기존 구조물을 철거할 때에는 시공자로 하여금 현황도(측면도, 평면도, 상세도,기타 수량산출시 필요한 사항)와 현황사진을 작성하여 제출토록 하고, 이를 검토□확인하여 발주청에 보고하고 설계변경시 계상하여야 한다.

17.14 감리원이 시공자에게 재시공 또는 공사중지명령 등 필요한 조치를 취한 때에는 이를 발주청에 보고하여야 한다. 다만, 발주청이 정하는 경미한 시정사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

17.15 설계변경 및 계약금액 조정 절차

□□□□□□□□□                          □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조 사 □                          □·기술검토       □

□       □                          □·경미한 설계변경□

□ 시 험 □                          □  시공지시       □

□□□□□□□□□                          □  ( 감  리  원 ) □

□                              □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                                       □

□                                       □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □   □□□□□□□□□□□□       □□□□□□□□□□                    □□□□□□□□□□□□□□   □□□□□□□□□□□□

□ 사업계획변경    □    □    □ ·발주기관의 지시            □   □   □          □       □        □                    □            □   □          □

□ 현장여건 불일치 □□□□□□□□□□□ ·시공자의 설계변경 여건보고 □□□□□□□□□ 방침결정 □□□□□□□□□설계변경□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□계약금액조정□□□□□ 변경계약 □

□ 신공법개발      □         □ ·시공자의 개선 제안 공법    □       □(발주기관)□   □   □(감리원)□                 □  □ (감 리 원) □   □          □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□         □ ·경미한 설계변경            □       □          □   □   □        □                 □  □            □   □(발주기관)□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□       □□□□□□□□□□□□   □   □□□□□□□□□□                 □  □□□□□□□□□□□□□□   □□□□□□□□□□□□

·설계변경사유서                                □ ·설계변경개요서             □   ·설계변경

·설계변경도면,개략적인 수량 증감내역           □ ·설계변경도면,시방서,계산서 □   ·물공량 정산

·개략적인 공사비 증감내역                      □ ·수량조서 및 산출조서       □   ·물가변동

□ ·기타 필요한 서류           □

□□□□□□□□□□□□□□                 □□□□□□□□□□□□□□

□변경시공지시□                 □변경시공지시□

□ (감 리 원) □                 □ (감 리 원) □

□□□□□□□□□□□□□□                 □□□□□□□□□□□□□□

(단순한 경우)                (복잡,중대한 경우)

□□□□□□□□□□□□□□□□                        □□□□□□□□□□□□□□□□□□                                               □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                □

□ 시   공   자 □                        □ 감  리  회  사 □                                               □ 발  주  기  관 □

□              □            □□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□                    □□□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□            □           □□□□□□□□□□□□□□□□□□             □                    □            □□□□□□□□□□□□□□□□□□              □

□                    □                    □                     □                    □                                            □

□□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□                             □□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조사, 시험   □     □ 설  계  자 □     □ 심    사    자 □     □ 설계변경제출 □     □ 검        토 □                             □              □

□ 변경설계도서 □     □            □     □                □     □              □     □              □                             □ 결      재   □

□ 작성 제출    □     □ (감 리 원) □     □ (비상주감리원) □     □ (대표자명의) □     □ (업무담당관) □                             □              □

□□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□□□□□□□□□□□□                             □□□□□□□□□□□□□□□□

18. 공정관리

18.1 감리원은 당해공사가 정해진 공기 내에 시방서, 도면 등에 의거하여 소요의 품질을 갖추어 완성될수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리하여야 한다.

18.2 감리원은 공사 착공일로 부터 30일 이내에 시공자로 부터 공정관리계획서를 제출받아 조속한 시일내에 검토하여 승인하고 이를 발주청에 제출하여야 한다.

18.3 감리원은 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되도록 조치하여야 한다.

18.4 감리원은 공사 진도율이 계획공정대비 월간공정실적이 20% 이상 지연(계획공정대비 누계공정 실적이 100%이상인 경우는 제외)되거나 누계공정 실적이 10% 이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표 수립을 지시하여 정상 공정을 회복할 수 있도록 하여야 한다.

18.5 감리원은 시공자가 준공기한 연기를 제출할 경우 이의 타당성을 검토, 확인하고 필요시 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

19. 안전관리

19.1 감리원은 시공자가 제반규정에 의하여 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공전에 제출받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

19.2 책임감리원은 소속감리원중 안전관리담당자를 지정하여 시공자의 안전관리자를 지도□감독하도록 하여야 하며, 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

19.3 감리원은 시공회사의 안전관리책임자와 안전관리자 등에게 교육시키고 이들로 하여금 현장근무자에게 안전교육을 실시토록 지도□감독하여야 한다.

19.4 감리원은 매 분기별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을시는 시정조치 하여야 한다.

20. 시설물의 인수□인계

20.1 감리원은 시공자로 하여금 당해 공사의 예비준공검사(부분준공, 발주자의 필요에 의한 기성부분 포함) 완료후 14일 이내에 시설물의 인수.인계를 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여야 한다.

20.2 감리원은 시공자로 부터 시설물 인수□인계 계획서를 제출받아 7일 이내에 검토,확정하여 발주청 및 시공자에게 통보하여 인수□인계에 차질이 없도록 하여야 한다.

20.3 감리원은 발주청과 시공자간의 시설물 인수□인계의 입회자가 된다.

20.4 감리원은 시공자가 제출한 인수□인계서를 검토,확인하며 시설물이 적기에 발주청에 인수□인계 될 수 있도록 한다.

20.5 감리원은 시설물 인수□인계에 대한 발주청 등의 이견이 있는 경우, 이에 대한 현상파악 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 시공자가 이를 수행토록 조치한다.

20.6 인수□인계서는 준공검사 결과를 포함하는 내용으로 한다.

20.7 시설물의 인수□인계는 준공검사시 지적사항 시정완료일부터 14일이내에 실시하여야 한다.

20.8 감리원은 당해 공사와 관련한 감리기록 서류중 발주청에 인계할 문서의 목록을 발주청과 협의, 작성하여야 하며 감리용역 준공후 14일 이내에 CD-ROM으로 작성하여 발주청에 인수□인계하여야 한다.

21. 유지관리

당해 감리전문회사 대표자는 발주청이 유지관리상 필요하다고 인정하여 기술자문 요청 등이 있을 경우에는 이에 협조하여야 하며, 전문적인 기술등으로 외부 전문기술 또는 상당한 노력이 소요되는 경우에는 발주기관의 장과 별도 협의하여 결정한다.

22. 하자보수관련

감리전문회사 및 감리원은 공사 준공후 발주청과 시공자간의 시설물의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우 검토 의견을 제시하여야 하며 발주청이 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다. 단, 감리기간이 지난후에 수행하여야 할 경우에는 발주청은 별도의 실비를 감리원에게 지급하여야 한다. 다만 하자사항이 감리부실에 기인할 경우에는 제외한다.

23. 과업지시 내용의 해석

본 과업지시 내용에 관하여는 관련법 해석상 하자가 없는 한 발주청의 해석에 우선한다. 이때의 해석은 건설기술관리법 또는 정부기관의 제 기준에 준한다.

24. 보안대책

24.1 감리용역 착수시 감리종사자의 보안각서를 제출한다.

24.2 보안사항은 발주청과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임은 감리회사가 진다. 특히, 감리회사 대표자는 보안대책을 강구하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

24.3 감리용역 과업자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 위하여 감리원의 교육을 철저히 행한다.

25. 경과조치등

25.1 본 과업지시 내용은 계약과 동시에 효력을 발생한다.

25.2 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항중 책임감리업무와 관련 추가하여야 할 업무내용 또는 해석상 이견이 발생될 시는 관련법규에 의거 발주청과 협의 조정한다.