[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)	고승구 (560-2496)
③정책사업명	고한19리 재해위험개선지구 정비사업
④선정기준	군이 발주하는 10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤사업기간	2014 ~ 2016
⑥주요내용	❍ 배경 및 목적 - 하천범람 등 침수위험으로부터 주민의 생명과 재산의 보호 ❍ 사업개요 - 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 62-157번지 일원 - 사업량 ․ 보상 1식(토지 28필지 / 1,254㎡) ․ 건물철거 17동, 하천정비 L=167m, 부대공 1식 - 사업비 : 6,500백만원(국 3,250 도 650 군 2,600) ※ 2014년 4,500백만원, 2015년 2,000백만원 ❍ 추진실적 - 2012. 4. 3. : 자연재해위험개선지구 지정 - 2014. 2월 ~ 2015. 10월 : 실시설계 추진 - 2015. 5. 19. : 설계 사전검토(국민안전처) - 2015. 9월 ~ 10월 : 정비공사 계약심사 및 일상감사 - 2015. 11. 4. : 업체선정 및 계약 - 2015. 11. 9. : 공사착공 - 2015. 12. 9. : 주민설명회 - 2015. 12. 23. : 동절기 공사정지 - 2016. 3. 11. : 공사정지 해제 및 공사 재착공 ❑ 향후계획 - 2016. 3. 11. ~ : 공사추진 - 2016. 10월 : 공사준공