[별지 제2호서식]

정책실명제 사업관리 이력서

등록번호	2016-18	담당부서 작성자	(도시건축과) (윤광수/2312)
정 책 명	정선 군관리계획(재정비) 수립 용역
사업개요	○ 추진배경 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제34조에 따라 5년마다 군 관리계획 재정비 - 불합리한 용도지역·지구 등에 대한 재정비를 통한 계획적이 고 체계적인 토지이용계획 수립으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 추진기간 : 2013.8.5. ~ 2016.9.15. ○ 총사업비 : 1,754백만원 ○ 주요내용 - 과 업 량 : 9개 읍·면(A=1,220.67㎢) - 군관리계획 재정비, 경관·교통·사전재해성 검토, 수치지 형도 제작, 재해취약성분석
추진경과	□ 추진경과 ○‘13.8.5 : 정선 군관리계획(재정비) 용역 착수(1차분) - 용역회사: (주)도화종합기술공사 대표이사 이윤한외 3개사 - 도시지역 8개 읍면 항공사진 촬영 완료 : ‘13.11. ○‘14.4.1 : 1차분 용역 준공(600백만원) - 기초조사 및 수치지형도 제작 완료 ○‘14.4.16 : 2차분 용역 착수 ○‘14.12.22 : 2차분 용역 준공(440백만원) ○‘15.1.15 : 3차분 용역 착수 ○‘15.4.24. ~ 5.8 : 주민의견청취 공람공고(신문게재 등) ○‘15.6.12. ~ 6.25 : 주민의견청취 공람공고 2차(신문게재 등) ○‘15.9.9 : 정선군의회 의견청취(원안찬성) ○‘15.12.1.~12.16 : 주민의견청취 공람공고 3차(신문게재 등) ○‘15.10.16 : 정선군 군계획위원회 심의 및 자문 ○‘16.3.25 : 강원도 도시계획위원회 심의 ○‘16.4.15 : 군결정사항 결정(변경) 고시 - 정선군고시 제2016-25호 ○‘16.4.29 : 용도지역·지구 등 도 결정사항 결정(변경)고시 - 강원도고시 제2016-150호 ○‘16.9.15 : 3차분 용역 준공(714백만원) ○‘16.9.23 : 군관리계획(재정비)결정(변경) 지형도면 승인고시 - 정선군고시 제2016-98호

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능