10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정선형 청년마을 조성사업

담당자

기획관 최본심(☎560-2253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방소멸대응기금을 활용하여 인구감소 위기에 효과적 대응

○ 우리지역 저출산·고령화 극복을 위하여 열악한 청년 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위 치 : 강원특별자치도 정선군 북평면 북평리 221-1 외 2필지

○ 규 모 : 임대형 주택 10호

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000	-	-	1960	4,040
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,260	-	-	1,260	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(기금)	4,740	-	-	700	4,040

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 청년마을 조성 및 운영을 위한 타당성 조사용역 추진 : ’22. 10월 ~ ’23. 3월

○ 「정선형 청년마을 조성 개발계획 수립 용역」 추진 : ’23. 3월 ~ 6월

○ 기본 및 실시계획 추진 : ’23년 7월

○ 토지 감정평가, 경계측량, 현황측량 완료

○ 공공건축심의를 위한 「건축기획」 용역 추진 : ’23년 7월 ~ 11월

□ 향후계획

○ 건축공사 착공 및 준공·입주 개시 : ’24년 ~ ’25년(예정)

사업명

도로기반 지하시설물 전산화 확산사업(1단계)

담당자

민원과 정재모(☎560-2184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년 이전 설치된 도로 및 지하시설물(상·하수도)에 대하여 측량, 조·탐사를 통해 정확한 위치 및 속성정보(설치일자, 관경, 관재질 등)를 전산화하여 효율적인 시설물 관리 및 각종 안전사고를 사전에 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2025. 12. (5차년 사업)

○ 위 치 : 신동읍, 화암면, 남면 일원

○ 규 모 : 도로 및 상·하수 시설물 314.5km DB구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	200	500	600	1,100
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	200	500	600	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 1·2차 사업(2021,2022년) 완료

- 화암면 전지역 및 남면 일부 지역 / 도로 및 상·하수 시설물 104.5.㎞ DB 구축

○ 3차 사업(2023년) 진행 중

- 남면 및 신동읍 일부 지역 / 도로 및 상·하수 시설물 77.5㎞ DB 구축

- 현재 시설물 측량 및 조·탐사 완료 후 DB 작업 진행 중

□ 향후계획

○ 2024년 4차 사업추진(신동읍 일원)

○ 2025년 이후 북부권(여량·북평·임계면) 확산사업 예정

□ 사업변경 내역

○ 당초(투자심사) : 사업비 2,529백만원 / 3차년사업

○ 변경 : 사업비 2,400백만원 / 5차년사업

사업명

사북어린이집 이전 신축

담당자

가족행복과 김기수(☎560-2973)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 사북어린이집은 사북읍 및 인접 지역의 보육을 책임지는 거점 국공립어린이집으       로 가정어린이집의 폐원 등으로 인한 보육 공백 발생을 대비하기 위하여 지역 영       유아의 보육 수요를 수용하고 양질의 보육서비스 제공을 위한 어린이집의 규모를       확대할 필요성이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2024. 3.

○ 위 치 : 사북읍 사북리 294-15

○ 규 모 : 신축 1동(지상2층 / 정원 120명 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 81백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,100		4,800	3,050	250
국 비	1,000		500	500
시 도 비	500		250	250
시군구비	4,200		1,650	2,300
지 방 채
민간자본	2,400		2,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기본계획 수립 : 2021. 1.

○ 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인 : 2021. 4.

○ 부지 확보 완료 : 2021. 6.

○ 하나금융그룹-정선군 국공립 지원사업 협약 체결 : 2021. 7.

○ 설계업체 선정 및 실시설계 착수 : 2021. 7.

○ 실시설계 완료 : 2022. 8.

○ 건축공사 착공 : 2022. 12.

○ 장애물 없는 생활환경(BF)인증제 예비인증: 준공 이후(2023. 12.)

□ 향후계획

○ 준공 : 2023. 12.

○ 개원 준비 및 개원 : 2024. 1. ~ 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 내부 인테리어(기구-붙박이장), 사무용품 및 비품, 이사비용 등 추가

(단위 : 백만원)

구 분	당 초		변 경		증감액
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
총사업비	5,950		8,100		2,150
공사비	4,110	- 건축공사 : 1,901백만원 - 기계공사 : 727백만원 - 전기공사 : 516백만원 - 통신공사 : 230백만원 - 소방공사 : 131백만원 - 부대시설 : 614백만원	5,800	- 건축공사 : 2,523백만원 - 토목공사 : 361백만원 - 조경공사 : 37백만원 - 기계공사 : 872백만원 - 전기공사 : 363백만원 - 통신공사 : 105백만원 - 소방공사 : 132백만원 - 인테리어공사 : 818백만원 - 예 비 비 : 610백만원	1,690
보상비	1,400	- 부지보상비 : 1,400백만원	1,380	- 부지보상비 : 1,380백만원	△20
용역비	240	- 설계비 : 190백만원 - 감리비 : 47백만원	520	- 설계비 : 280백만원 - 감리비 : 242백만원	280
기타	200	- 기자개 구입 : 100백만원 - 실외놀이터 조성 : 100백만원	300	- 기자재 구입 : 200백만원 - 예비비(이사비용) : 50백만원	100
분담금	-		100	- 본인인증비용 : 16.5백만원 - 상수도분담금 : 78.5백만원 - 도시가스분담금 : 4백만원 - 한전불입금 : 3.4백만원	100

사업명

고한 복합문화센터 건립

담당자

가족행복과 윤지혜(☎560-2943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 문화 활동 진흥과 주차난 해소를 위해 생활문화센터, 주차장을 포함한 복합문화센터를 건립하고, 시가지와 주거단지 사이의 주민 이동 편의성을 향상시키기 위해 보행교를 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023년(‘20.설계 / ’21~23.시공)

○ 위 치 : 강원도 정선군 고한읍 고한리 274-13

○ 규 모 : 신축 1동(지상 7층) / A=4,840.11㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,207백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,207	351	1,822	7,460	-
국 비	2,323	96	477	1,590
시 도 비	284	0	61	223
시군구비	10,600	255	604	5,326	4,415
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,000	0	680	320

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계용역 실시         : ‘20. 05.~’20. 12.

○ 2021년 제1차 강원도 투자심사 실시 : ‘21. 02.

○ 신축공사 착공                     : ’21. 08.

○ 신축공사 준공                     : ’23. 06.

□ 향후계획

○ BF 및 녹색인증 : ‘23. 8.~9.

○ 센터 개관     : ’23. 9.

□ 사업변경 내역

구 분	당초(2019년)	변경(2021년)	비고
사업규모	A=3,300㎡(지상6층)	A=4,840.11㎡(지상7층)

사업명

아리아리 이음 플랫폼 조성

담당자

가족행복과 전봄이(☎560-2015)

□ 사업목적 및 필요성

○ 융·복합 생활문화교육시설(공공도서관, 다함께돌봄센터, 평생학습관)을 건립       하여 주민 편익 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023

○ 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 54-7

○ 규 모 :  복합건물 신축 1동(A=3,119㎡), 지하1층~지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,565백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,565	5,080	2,542	3,943
국 비	3,811	2,540	1,271
시 도 비	1,143	762	381
시군구비	6,011	1,778	290	3,943
지 방 채
민간자본
기 타	600		600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 기본계획 수립 : 2019. 7.

○ 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : 2020. 3.

○ 설계 경제성 검토(VE) : 2021. 3.

○ 건축허가, 일상감사 및 계약심사 : 2021. 9. ~ 10.

○ 부지정리(기존건물 철거) 및 본공사 착공 : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 건립공사 추진 : 2021. 12. ~ 2023. 12.

○ 개관 : 2024. 상반기 중

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	부지면적12,355㎡	부지면적9,434㎡	2,921㎡ 감
총사업비	7,622백만원	11,565백만원	지방비 3,943백만원 증
사업기간	2020~2022	2020~2023	1년증

사업명

정선군 가족센터 건립

담당자

가족행복과 유영선(☎560-2342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중심의 보편적 가족서비스 제공에 대해 주민들의 욕구를 충족시키며,       주변 주거지 밀집으로 인한 골목길 불법주차 등 심각한 주차문제 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 54-1

○ 규 모 : A=1,800㎡(지상2층), 주거지주차장 1,839㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500	5,084	3,416
국 비	2,700	1,613	1,087
시 도 비	989.6	566.3	423.3
시군구비	4,810.4	2,904.7	1,905.7
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

○ 기본계획 수립 : 2019. 7

○ 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : 2020. 3

○ 설계 경제성 검토(AV) 완료 : 2021. 3

○ 부지정리(기존건물 철거) 및 본공사 착공 : 2021. 12

□ 향후계획

○ 정선군 가족센터 건립공사 추진 : 2021. 12 ~ 2023. 12

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2020~2022	2020~2023

사업명

화암 힐링 & 아트하우스

담당자

관광과 윤수정(☎560-2363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화암면의 빼어난 자연환경과 더불어 예술인들이 모여드는 힐링 마을로 생활인구를 유입하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년

○ 위 치 : 정선군 화암면 화암리 1183-1번지(화암약수) 일원

○ 규 모 : 힐링캠프 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,500	0	500	800	5,200
시군구비	2,100	0	0	0	2,100
기타(기초기금)	4,400	0	500	800	3,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 화암관광지(약수지구) 편입시설물 매입․활용계획 수립 : ‘20. 9월 11일

○ 화암관광지(약수지구) 편입시설물 보상완료      : ‘22. 6월 3일

○ 건축물 안전진단 용역 추진                    : ‘22. 6월 ~ 10월

○ 활용방안 용역 추진                         : ‘22. 6월 ~ ‘23.  2월

○ 지장물철거 및 팔각정 리모델링 실시설계용역 추진   : ‘23. 1월 ~ 4월

○ 편입시설물 석면해체공사                      : ‘23. 4월 ~ 5월

○ 지장물 철거공사 및 폐기물 처리용역           : ‘23. 6월 ~ 7월

○ 팔각정 리모델링공사                          : ‘23. 6월 ~ 10월

□ 향후계획

○ 실시설계용역 추진                          : ‘24. 1월 ~ ‘24.  3월

○ 사업 추진                                  : ‘24. 4월 ~ ‘26. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

마음치유 정선 웰니스 관광 확대

담당자

관광과 박지후(☎560-2370)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 주도 웰니스 관광 운영체계 조직을 통한 자생적이고 지속적인 관광발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년~2026년

○ 위 치 : 정선군 전역

○ 규 모 : 정선군 클러스터 3개 권역(총 1,221㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	900	0		189	711
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	900	0		189	711

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 마음치유 정선웰니스 관광확대를 위한 팸투어             : 완료

○ 마음치유 정선웰니스 관광확대를 위한 홍보이벤트        : 완료

○ 생활인구 증가를 위한 문화관광케어 사업 정선로컬서밋 지원 : 완료

□ 향후계획

○ 웰니스 관광산업 종사자 및 관계자 네트워크 구축

○ 지속가능한 웰니스 사업 추진을 위한 홍보 및 체험프로그램 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 「2023 올해의 웰니스 관광도시 사업」 공모 선정에 따라 사업내용이 중복되어 마음치유 정선웰니스 관광확대 홍보 및 지원사업 추진

사업명

강원고생대국가지질공원을 활용한 생활인구유입 확대 지역협력사업

(지방소멸대응기금)

담당자

관광과 심지연(☎560-2379)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강원고생대 국가지질공원의 우수성과 가치를 알리고 지질관광, 교육관광       활성화를 통해 관광객 및 생활인구 유입 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년

○ 위 치 : 4개시군(정선군, 태백시, 영월군, 평창군), 21개소 지질명소

○ 규 모 : 강원고생대 국가지질공원 1,990km2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	0	0	2,050	3,450
국 비
시 도 비	4,300	0	0	1,600	2,700
시군구비	1,200	0	0	450	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ (영월) 선돌 데크로드 정비 실시설계용역 완료 : 2023. 3.

○ (태백) 용연동굴 시설개선 사업완료 : 2023. 6.

○ (평창) 마하생태관광지(본동지구) 보수공사 사업완료 : 2023. 7.

□ 향후계획

○ (정선) 지질공원 탐방객센터 시설개선사업 완료 : 2023. 8.

○ (영월) 선돌 데크로드 정비사업 완료 : 2023. 10.

○ (평창) 마하생태관광지(본동지구) 추가정비 : 2023. 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2022 장애물 레이스대회

담당자

문화체육과 유진영(☎560-2083)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 동계올림픽 개최 장소인 정선 알파인경기장에서 장애물 레이스대회 개최함으로써 익스트림 스포츠를 통해 관광객 유치 및 주변 숙박, 관광을 통한 지역경제 활성화 도모, 알파인경기장 곤돌라 이용 및 올림픽 기념관 홍보 성과 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 2022. 9.(행사일시: 2022. 6. 25. ~ 6. 26.)

○ 위 치 : 정선군 북평면 숙암리(정선알파인경기장 일원)

○ 규 모 : 장애물 레이스대회 개최 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	100	-	100	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 계획 수립: 2022. 1. ~ 5.

○ 코스 및 행사장 조성: 2022. 5. ~ 6.

○ 장애물레이스 대회 운영: 2022. 6. 25. ~ 6. 26.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 장애물 레이스대회 사업기간 변경

구 분	당 초(투자심사)	변경 후	비 고
사업기간	2022.3.18.∼6.31.	2022.3.18.∼9.30.

사업명

정암사 문화콘텐츠 활용사업

담당자

문화체육과 김주희(☎560-2564)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통사찰 정암사의 유무형 문화콘텐츠를 활용한 프로그램 추진으로 정선지역 홍보 및 관광수요 증진

○ 문화유산 활용을 통한 지역경제 활성화 및 지역브랜드 가치 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리1 일원

○ 규 모 : 정암사 개산문화제 개최 및 정암사 수마노탑 국보승격 기념전시 개최(서울 및 정선 총3회)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	480	90	150	90	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 정암사 개산문화제 개최 : 2022. 10.

○ 정암사 수마노탑 국보승격 기념전 추진 : 서울(2022.8) 및 정선(2022.9~10.)

□ 향후계획

○ 2024년 이후 도비 확보하여 해당 사업 지속 추진 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

정선종합경기장 부대시설 공사

담당자

문화체육과

유돈오(☎560-2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 생활 수준 향상으로 체육에 대한 수요가 증가 함에 따라 생활체육 기반시설 조성으로 삶의 질을 향상시키기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 2023년 6월

○ 위 치 : 정선종합경기장 일원

○ 규 모 : 철골(26개소, H=50m) 제작설치 및 비구망 및 와이어로프 제작

및 부대설비 공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,430		1,300	1,130
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 1차사업(2022년) 완료 / 철골 및 비구망 제작 설치

○ 2차사업(2023년) 진행중/ 비구망 보강 및 부대설비 공사

- 철골 및 와이어 안전 보강 및 주변 환경 정비 공사

□ 향후계획

○ 2023년 종합경기장 주변 환경정비를 실시하여 기존 사업을 완료함.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초(투자심사) : 사업비 2,800백만원 / 1년 6개월 사업

○ 변경          : 사업비 2,430백만원 / 2년 사업

사업명

대한민국 아리랑 축전

담당자

문화체육과 김영원

(☎560-2548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「대한민국 아리랑」의 인류무형문화유산 등재에 따른 전승 공연

○ 다양한 공연과 문화체험으로 군민의 문화예술 향유 기회 제공 및 지역        경기 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 9월 15일～ 2022년 9월 18일(4일)

○ 위 치 : 정선군 정선읍 봉양리 일원

○ 규 모 : 제10회 세계 대한민국 아리랑 축전 개최

(각종 아리랑 경창대회, 아리랑 노래와 춤 경연대회, 전통문화 체험 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,000	250	250	250	250
국 비
시 도 비	580	145	145	145	145
시군구비	420	105	105	105	105
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제10회 세계 대한민국 아리랑 축전 기본계획 수립 : `22. 2.

○ 제10회 세계 대한민국 아리랑 축전 실행계획 수립, 사업비 교부 : `22. 8.

○ 세계 대한민국 아리랑 축전 개최 : `22. 9.

□ 향후계획

○ 제11회 세계 대한민국 아리랑 축전 사업 완료 : `22. 12.

사업명

수소충전소 구축사업

담당자

전략산업과 최호근(☎560-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수소연료전지 자동차의 보급 활성화를 위한 수소차 구입 보조금 지원 및

충전 인프라 설치지원을 통한 친환경 자동차의 보급을 앞당기는데 기여

하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 미정

○ 규 모 : 250㎏/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	0	0	300	2,900
국 비	1,600	0	0	150	1,450
시 도 비	800	0	0	75	725
시군구비	800	0	0	75	725
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 수소충전소 설치부지 미선정

□ 향후계획

○ 수소충전소 설치부지 선정 및 확정

○ 실시설계용역 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

야생화 마을 광차체험코스

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광차체험코스 설치로 관광지 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 파인앤유아파트 ~ 삼탄아트마인

○ 규 모 : 광차체험코스(L=2.6㎞, A=36,000㎡), 보행로(A=7,159㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,045	0	4,445	0	13,600
시 도 비	12,631.5	0	3,111.5	0	9,520
시군구비	5,413.5	0	1,333.5	0	4,080

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 강원도개발공사 업무대행 협의	: 2021. 12월

- 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2022. 3월

○ (정선군) 군관리계획(시설궤도) 결정변경 용역 착수	: 2022. 3월

○ (정선군) 재해영향성 검토용역 착수	: 2023. 5월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 준공	: 2024.  2월

○ 토지 및 지장물 보상	: 2023. 12월

○ 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가	: 2024.  3월

○ 공사 착공	: 2024.  6월

○ 공사 준공 및 사업완료	: 2025. 12월

□ 사업변경 내역

○ 당  초 :

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 광차체험코스(L=3.6㎞, A=36,000㎡), 철도횡단 육교설치 1식

○ 변  경 :

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 광차체험코스(L=2.6㎞, A=36,000㎡)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

사북역 별빛광장 조성사업

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북 도심지역 빛의 도시 조성과 연계한 사북역 일원 새로운 도시경관 창출 및 사북중심상권 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 사북읍 사북역 일원

○ 규 모 :

- 건축물 (A=2,768.09㎡, 지하2,600.91, 지상107.18, 지하주차 87면)

- 지상 별빛광장 조성 (A=3,454㎡), 도로 및 지상주차장(A=1,741㎡, 주차15면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,183	0	483	0	13,700
시 도 비	9,928	0	338	0	9,590
시군구비	4,255	0	145	0	4,110

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 3월

□ 향후계획

○ 토지보상 및 지장물보상	: 2024. 2월

○ 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가	: 2024. 4월

○ 별빛광장 조성공사 착공	: 2024. 6월

○ 별빛광장 조성공사 준공 및 사업완료	: 2025. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당  초

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 부지(A=7,000㎡), 주차장(A=2,534㎡, 154면)

○ 변  경

- 사업기간 : 2021~2025년

- 사업내용 : 부지(A=5,195㎡), 주차장(A=2,768.09㎡, 102면)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

사북 풍요로운 빛의 도시

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유‧무형의 “빛”을 활용하여 시가지를 관광자원화 함으로서 관광객 유인을 통한 지역경제를 활성화하고 650거리 및 지장천변을 중심으로 기존 지역자원에 예술이 있는 빛을 더하여 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023년(3년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사음1교)

○ 규 모 : 경관데크로드 L=300m, 특화조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,505	20	3,169	2,316
시 도 비	3,854	14	2219	1621
시군구비	1,651	6	950	695

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 착수                             : ‘21. 2월 ~

○ 지방하천(지장천)수리수문 분석용역 착수 및 준공 : ‘21. 7월 ~ 9월

○ 실시설계용역 준공                              : ‘22. 6월

○ 지장천 경관 데크로드 조성사업 착공             : ‘22. 7월 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당  초

- 사업기간 : 2021~2022년

- 사 업 비 : 2,300백만원

○ 변  경

- 사업기간 : 2021~2023년

- 사 업 비 : 5,800백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

야생화마을 골목길 정원박람회

담당자

전략산업과 정의성(☎560-2350)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 축제인 『함백산 야생화 축제』와 연계하여 고한의 문화 자원과 시장 자원을 적극적으로 활용하고 문화콘텐츠 산업 분야를 새롭게 개척하여 지역민의 자긍심 고취와 관광객의 재방문을 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 4월 ~ 10월

○ 위 치 : 정선군 고한읍 일원

○ 규 모 : 골목길 정원박람회 개최 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200		200
국 비
시 도 비	140		140
시군구비	60		60
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 골목길 정원박람회 개최

- 골목형 정원조성(화단형, 수직형, 행거형 등)

- 오프닝 이벤트, 정원 버스킹, 인비테이션 가든 페스티벌 등

□ 향후계획

○ 소규모 정원조성 및 전시를 통한 특색 있는 관광자원을 주민 스스로 육성함으로써 마을단위 관광 활성화

사업명

수소충전소 구축사업

담당자

전략산업과 최호근(☎560-2483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수소연료전지 자동차의 보급 활성화를 위한 수소차 구입 보조금 지원 및

충전 인프라 설치지원을 통한 친환경 자동차의 보급을 앞당기는데 기여

하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 미정

○ 규 모 : 250㎏/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	0	0	300	2,900
국 비	1,600	0	0	150	1,450
시 도 비	800	0	0	75	725
시군구비	800	0	0	75	725
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 수소충전소 설치부지 미선정

□ 향후계획

○ 수소충전소 설치부지 선정 및 확정

○ 실시설계용역 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

야생화 마을 광차체험코스

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 광차체험코스 설치로 관광지 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 파인앤유아파트 ~ 삼탄아트마인

○ 규 모 : 광차체험코스(L=2.6㎞, A=36,000㎡), 보행로(A=7,159㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,045	0	4,445	0	13,600
시 도 비	12,631.5	0	3,111.5	0	9,520
시군구비	5,413.5	0	1,333.5	0	4,080

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 강원도개발공사 업무대행 협의	: 2021. 12월

- 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2022. 3월

○ (정선군) 군관리계획(시설궤도) 결정변경 용역 착수	: 2022. 3월

○ (정선군) 재해영향성 검토용역 착수	: 2023. 5월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 준공	: 2024.  2월

○ 토지 및 지장물 보상	: 2023. 12월

○ 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가	: 2024.  3월

○ 공사 착공	: 2024.  6월

○ 공사 준공 및 사업완료	: 2025. 12월

□ 사업변경 내역

○ 당  초 :

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 광차체험코스(L=3.6㎞, A=36,000㎡), 철도횡단 육교설치 1식

○ 변  경 :

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 광차체험코스(L=2.6㎞, A=36,000㎡)

사업명

사북역 별빛광장 조성사업

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북 도심지역 빛의 도시 조성과 연계한 사북역 일원 새로운 도시경관 창출 및 사북중심상권 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 사북읍 사북역 일원

○ 규 모 :

- 건축물 (A=2,768.09㎡, 지하2,600.91, 지상107.18, 지하주차 87면)

- 지상 별빛광장 조성 (A=3,454㎡), 도로 및 지상주차장(A=1,741㎡, 주차15면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,183	0	483	0	13,700
시 도 비	9,928	0	338	0	9,590
시군구비	4,255	0	145	0	4,110

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 3월

□ 향후계획

○ 토지보상 및 지장물보상	: 2024. 2월

○ 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획 인가	: 2024. 4월

○ 별빛광장 조성공사 착공	: 2024. 6월

○ 별빛광장 조성공사 준공 및 사업완료	: 2025. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당  초

- 사업기간 : 2021~2024년

- 사업내용 : 부지(A=7,000㎡), 주차장(A=2,534㎡, 154면)

○ 변  경

- 사업기간 : 2021~2025년

- 사업내용 : 부지(A=5,195㎡), 주차장(A=2,768.09㎡, 102면)

사업명

사북 풍요로운 빛의 도시

담당자

전략산업과 전충의 (☎560-2006)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유‧무형의 “빛”을 활용하여 시가지를 관광자원화 함으로서 관광객 유인을 통한 지역경제를 활성화하고 650거리 및 지장천변을 중심으로 기존 지역자원에 예술이 있는 빛을 더하여 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023년(3년)

○ 위 치 : 정선군 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사음1교)

○ 규 모 : 경관데크로드 L=300m, 특화조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,505	20	3,169	2,316
시 도 비	3,854	14	2219	1621
시군구비	1,651	6	950	695

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 착수                             : ‘21. 2월 ~

○ 지방하천(지장천)수리수문 분석용역 착수 및 준공 : ‘21. 7월 ~ 9월

○ 실시설계용역 준공                              : ‘22. 6월

○ 지장천 경관 데크로드 조성사업 착공             : ‘22. 7월 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당  초

- 사업기간 : 2021~2022년

- 사 업 비 : 2,300백만원

○ 변  경

- 사업기간 : 2021~2023년

- 사 업 비 : 5,800백만원

사업명

야생화마을 골목길 정원박람회

담당자

전략산업과 정의성(☎560-2350)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 축제인 『함백산 야생화 축제』와 연계하여 고한의 문화 자원과 시장 자원을 적극적으로 활용하고 문화콘텐츠 산업 분야를 새롭게 개척하여 지역민의 자긍심 고취와 관광객의 재방문을 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 4월 ~ 10월

○ 위 치 : 정선군 고한읍 일원

○ 규 모 : 골목길 정원박람회 개최 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	200		200
국 비
시 도 비	140		140
시군구비	60		60
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 골목길 정원박람회 개최

- 골목형 정원조성(화단형, 수직형, 행거형 등)

- 오프닝 이벤트, 정원 버스킹, 인비테이션 가든 페스티벌 등

□ 향후계획

○ 소규모 정원조성 및 전시를 통한 특색 있는 관광자원을 주민 스스로 육성함으로써 마을단위 관광 활성화

사업명

정선군 생활폐기물 매립시설 설치사업

담당자

환경과 이재천(☎560-4346)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 사용중인 생활폐기물 처리시설의 노후 및 용량 포화로 새로이 매립       시설을 조성하여 생활폐기물을 안정적으로 처리하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)

○ 위 치 : 선정 진행중

○ 규 모 : 매립시설 95,513㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,916백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,916	20	0	0	10,896
국 비	3,275	6	0	0	3,269
시 도 비	2,292	4	0	0	2,288
시군구비	5,349	10	0	0	5,339
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 타당성 및 기본계획 연구용역 : `19. 11월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 1~3차 : `19. 11월 ~ `20, 8월

○ 생활폐기물 처리시설 입지 타당성 용역 : `21. 5월 ~ `21. 7월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 4차 : `22. 2월 ~ `22. 3월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 5차 : `23. 5월 ~ `23. 7월

□ 향후계획

○ 생활폐기물 처리시설 입지선정위원회 구성 : ‘23. 12월

○ 입지후보지 타당성 조사 및 전략환경영향평가 : ’24. 12월

○ 입지선정 결정고시 : ’25. 1월

사업명

정선군 생활폐기물 소각시설 설치사업

담당자

환경과 이재천(☎560-4346)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 사용중인 생활폐기물 처리시설의 노후 및 용량 포화로 새로이 소각       시설을 조성하여 생활폐기물을 안정적으로 처리하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)

○ 위 치 : 선정 진행중

○ 규 모 : 소각시설 36톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,323백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,324	0	0	0	18,324
국 비	5,497	0	0	0	5,497
시 도 비	3,848	0	0	0	3,848
시군구비	8,979	0	0	0	8,979
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 타당성 및 기본계획 연구용역 : `19. 11월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 1~3차 : `19. 11월 ~ `20, 8월

○ 생활폐기물 처리시설 입지 타당성 용역 : `21. 5월 ~ `21. 7월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 4차 : `22. 2월 ~ `22. 3월

○ 생활폐기물 처리시설 설치사업 입지 선정 공모 5차 : `23. 5월 ~ `23. 7월

□ 향후계획

○ 생활폐기물 처리시설 입지선정위원회 구성 : ‘23. 12월

○ 입지후보지 타당성 조사 및 전략환경영향평가 : ’24. 12월

○ 입지선정 결정고시 : ’25. 1월

사업명

군도7호(사북~직전) 도로개설

담당자

건설과 김진석(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접근도로 개선으로 지역발전 및 경기 활성화 견인, 주거형지구단위계획 구역 개발촉진으로 균형발전 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위 치 : 강원도 정선군 사북읍 사북리 348번지 ~ 직전리 521-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 L=1.73km(터널 L=314m) B=8.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,000	14,905	3,095	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,000	14,905	3,095	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본 및 실시설계	: 17년 ~ 18년

○ 사업착공	: 19. 5월

○ 터널굴착 및 라이닝 완료	: 21. 12월

○ 사업준공	: 22. 9월

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군도6호(가수리) 상습침수도로 개선

담당자

건설과 김진석(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 집중호우시 침수로 인한 상습 교통두절 및 고립구역 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 가수리 193번지 일원

○ 규 모 : 교량 1개소 L=90m, 접속도로 L=280m B=8.0m ~ 9.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,600	2,980	1,620	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	150	-	-	-
시군구비	4,450	2,830	1,620	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계	: 19. 11월

○ 사업착공	: 20. 3월

○ 거더거치 완료	: 22. 5월

○ 접속도로 도로 추진	: 23. 3월

○ 사업준공	: 23. 7월

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 동절기 공사중지, 강우일수, 관급자재(철근 등) 수급지연 등에 따른 공사기간 변경(당초 준공 : 23. 4월 → 변경 23. 7월)

사업명

정선읍 신도로망 구축사업

담당자

건설과 김진석(☎560-2485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정선읍 행정·사업 중심지와 문화관광 중심지와의 접근성 향상을 통한 지역 균형발전.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년

○ 위 치 : 강원도 정선군 정선읍 봉양리 114-4번지 ~ 535-8애산리 번지 일원

○ 규 모 : 도로 L=684m(교량 L=475m), 접속도로 207m, B=14~14.8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,500	7,500	3,000	5,348	33,652
국 비	10,200	-	-	2,674	7,526
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	39,300	7,500	3,000	2,674	26,126
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계	: 21. 10년

○ 사업착공	: 21. 12월

○ 교대, 교각 지하 기초 굴착	: 22. 12월

□ 향후계획

○ 교대, 교각 지상부 추진	: 23년

○ 교량 상부공 추진	: 24년 ~25년

○ 접속도로 추진 및 사업준공	: 26. 1월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 동절기 공사중지에 따른 공사기간 변경

(당초 준공 : 25. 11월 → 변경 26. 1월)

사업명

고한 소1-21호(고토일) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한14리 고토일 일원 도로 확포장을 통한 주민통행불편 해소와 도시기반       시설 확충으로 주민 정주여건 개선 및 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 169-1번지 ~ 산 55-7번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=10m, 손실보상 1식(토지 21필지, 건물 6동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	50	50	500	2,900
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	50	50	500	2,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 사전검토용역	: 2019. 8월 ~ 10월

○ 주민설명회	: 2020. 2월

○ 보상협의 주민의견 수렴	: 2020. 10월 ~ 2021. 6월

○ 실시설계용역 착수	: 2021. 10월

○ 실시설계용역 준공	: 2022. 12월

○ 분할측량 의뢰(사유지 지적오류 정정중)  : 2023. 06월

□ 향후계획

○ 지적 정정(사유지) 및 토지분할          : 2023. 11월

○ 감정평가 및 보상 협의	: 2023. 12월

○ 보상협의 완료                         : 2024. 10월

○ 계약심사 및 공사발주	: 2024. 11월

○ 공사추진	: 2024. 12월 ~ 2025. 12월

사업명

고한 소3-11호(상갈래) 군계획시설 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 상갈래 일원 도시계획시설(도로) 미개설로 인한 주민생활불편이       지속되고, 주택 밀집지역 화재 발생시 소방차 진입이 어려움에 따라 도로       개설을 통하여 주민의 생명과 재산을 보호하고 주민정주여건을 개선하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 고한읍 고한리 274-18번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=240m, B=6m, 옹벽 265m(H=3~5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	2,158	303	989	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	2,158	303	989	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계용역 추진	: 2019. 1월 ~ 11월

○ 주민설명회 개최	: 2019. 8월

○ 감정평가	: 2019. 11월

○ 보상협의	: 2020. 1월 ~

○ 석면조사 및 지정폐기물철거	: 2021. 8월 ~ 12월

○ 지장물(건물) 철거(23동) 추진                  : 2021. 12월 ~ 2022. 9월

○ 본공사 착공                                  : 2023. 12월

□ 향후계획

○ 본공사(도로개설) 추진 및 준공	: 2023. 3월 ~ 12월

사업명

군도7호(사북~직전) 접속도로 개설

담당자

도시과 이정혁(☎560-2468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사북 ~ 직전간 군도7호 개통예정에 따른 사북중심시가지 유입의 차량증가가       예상됨에 따라, 시가지 진입로 확포장을 통한 접근성을 향상시키고 보다       안전하고 편리한 교통인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 사북읍 사북리 307-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=141m, B=10m, 손실보상 1식(토지 6필지, 건물 5동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,900	-	1,654	594	-
국 비
시 도 비
시군구비	4,900	-	1,654	594	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계용역	: 2020. 10월 ~ 2021. 8월

○ 감정평가	: 2021. 2월

○ 보상협의	: 2021. 2월 ~ 12월

○ 공사착공	: 2021. 12월

□ 향후계획

○ 공사추진 및 준공	: 2022. 3월 ~ 10월

사업명

남면 철도연립 부지(건물) 매입

담당자

도시과김예섭(☎560-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남면 번영회로부터 노후된 남면 철도연립이 주변경관 및 주거환경을 저해하여       지역 주민들로부터 지속적으로 민원이 제기되어 주민불편 해소와 쾌적한       환경 조성을 위해 철거를 요청

○ 상기 부지에 공공임대아파트 건설을 통해 강원랜드 등 인구 유입 유도와       주거환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상을 도모.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2022년

○ 위 치 : 정선군 남면 무릉리 614-2번지 외 8필지

(무릉리 482-1,483-2,483-3,614-3,614-46,614-12,614-78,614-98)

○ 규 모 : 토지 9필지 / 3,405㎡, 건물 4동 / 2,635㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500		3,500
국 비
시 도 비
시군구비	2,500		2,500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000		1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 토지 및 지장물(남면 철도연립) 매매 계약 체결 : 2022. 9. 30.

사업명

정선군립병원 병동 증축사업

담당자

보건정책과 유병남(☎560-2960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의료취약지역의 거점의료기관으로서의 역할을 수행하는 군립병원의 의료       환경 개선으로 지역주민의 의료기본권을 보장하고 지역건강수준 향상을       위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2024년

○ 위 치 : 정선군 사북읍 지장천로 727

○ 규 모 : 본관동 증축(A=3,392.83㎡/지하1층~지상3층), 의료장비 구입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000	269	3,948	5,093	4,690
국 비	6,854		1,618	2,366	2,870
시 도 비	4,700		1,600	1,700	1.400
시군구비	2,446	269	730	1,027	420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 군립병원 병동 증축공사 추진(지상2층 바닥 공사 진행 중)

□ 향후계획

○ 정선군립병원 병동 증축공사 준공 : 2024년 3월(예정)

□ 사업변경 내역

○ 정선군립병원 병동 증축공사 사업기간 변경

- 당초 : 2022. 8월 ~ 2023.12월

- 변경 : 2022. 8월 ~ 2024. 3월

사업명

농업기계 화암분소 신설

담당자

기술지원과

최승수  (☎560-2597)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌 인구 고령화 및 농촌인구 감소로 향후 영농 기계화가 절실히 요구되어 농업기술센터 내 본소,신동,임계분소 외에 화암분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편함을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 2. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 화암면 화암리 402-1번지

○ 규 모 : 2동/연면적 868㎡

- 농업기계 보관창고 1동/ 220평 (사무실.정비실포함)

- 콩 선별장 1동 / 40평 규모

- 농업기계 실습교육장 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,450		1,504	1,946
국 비	600		361	239
시 도 비	120		72	48
시군구비	2730		1,071	1659
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95 %)

○ 농기계 임대사업소 화암분소 신축공사 준공 예정 (95%)

- 건물 준공완료, 내부 관급자재 설치완료, 공사 마감 완료예정

□ 향후계획

○ 화암분소 시범 운행 계획 : 2023. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	2동/연면적 868㎡	2동/연면적 868㎡
총사업비	24.5억	34.5억	시설비 증감
사업기간	2022.02~2022.12	2022.02~2023.09

사업명

고한읍 고한8리 20리 주차타워 조성사업

담당자

교통관리사업소 문진희(☎560-2512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 고한8리 20리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소

및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 63-40

○ 규 모 : 연면적 2,948㎡(지상3층), 건축면적 1,551㎡

철근콘크리트조, 주차대수 137면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,107백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,107	868	3,898	3,341
국 비	2,000	316	1,684
시 도 비	1,050	166	585	299
시군구비	5,057	386	1,629	3,042
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 생활SOC 수요 조사 제출                        : ‘19. 02월

○ 주차타워 조성 타당성 조사 용역                 : ‘19. 07월

○ 지방재정 투자 심사                             : ‘19. 11월

○ 기본 및 실시설계용역                           : ‘21. 04월

○ 공사 착공                                      : ’21. 10월

○ 건축공사 1차 설계변경                          : ‘22. 07월

□ 향후계획

○ 건축공사 2차 설계변경                          : ’23. 09월

○ 공사 준공                                      : ’23. 11월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 5,500백만원 → 변경 8,107백만원

○ 사업기간 : 당초 2020년 ~ 2022년 → 변경 2020년 ~ 2023년

사업명

고한읍 고한12리 주차타워 조성사업

담당자

교통관리사업소 문진희(☎560-2512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고한읍 고한12리 인구 밀집지역의 주차타워 조성으로 주차난 해소

및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 정선군 고한읍 고한리 120-5번지 일원

○ 규 모 : 연면적 6,786㎡(지상3층), 건축면적 2,378㎡

철근콘크리트조, 주차대수 211대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,200		6	257	6,937
국 비	700		3	128	569
시 도 비	3,980		1	39	3,940
시군구비	2,520		2	90	2,428
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 주차타워 조성 타당성 조사 용역                 : ‘20. 06월

○ 지방재정 투자 심사(도)                          : ‘21. 03월

○ 주차타워 조성부지 지반조사 용역                : ‘21. 11월

○ 기본 및 실시설계용역 제안 공모                 : ’22. 09월

○ 신기술·특허공법 공모                           : ’23. 02월

○ 기본 및 실시설계용역 완료                      : ’23. 06월

□ 향후계획

○ 조형물 철거 및 임시주차장 조성                 : ’23. 09월

○ 공사 입찰공고 및 계약 체결                     : ’23. 11월

○ 공사 착공                                      : ’24. 03월

○ 공사 준공                                      : ’24. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)